문서번호	주거정비과-865
결재일자	2021. 8. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주거정비행정팀장	주거정비과장
류상언	주혜란	08/03 代이정식

정비사업 e-종합정보관리시스템 구축 용역
월간업무보고(2021.7월)

2021. 8.

주거정비과

	월간 업무 현황 보고서
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호	PRJ_03
	버전	V1.1	사업명	정비사업 e-종합정보관리시스템 구축	작성부서	(주)유시스

▪ 사 업 명	: 정비사업 e-종합정보관리시스템 구축
▪ 사 업 부 서	: 서울특별시 주택건축본부 주거정비과
▪ 추 진 기 간	: 2021.07.01.-2021.07.30 (15개월차)

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척율		비고
				계획	실적
1	사업관리	2020.05.14~2021.08.13	종료	98%	98%	연장
2
3
4
5
6

주간(월간)업무현황보고서

월간 업무 현황 보고서

서울특별시                                                               PP515-/5                                                                     사업수행사

진행단계

구현

전체 진척율

98%

단위과제

금월계획 및 실적(2021.07.01.- 2021.07.30)

차월계획(2021.08.02.- 2021.08.13)

계 획

진척율

실 적

진척율

내 용

진척율

기획

▪ 분석/설계/구현/테스트 단계 산출물 작성 (필요시 보완)

▪ 종료 단계 산출물 작성

▪ 추가 요구사항 협의 및 관리

- 기능개선관리대장을 기반으로 기능개선 관리

▪ 시범운영 및 사용자교육 진행

▪ 시스템 전환 준비

▪ 종료단계 감리 시정조치 결과 확인 자료 준비 및 제출

▪ 기타 업무 협의

▪ 일정관리 및 통제

▪ 프로젝트 진행 보고

▪ 시스템 구축/개발 진행 확인

▪ 추정분담금 검증

▪ 본부장님 보고

98%

▪ 주간업무보고서 제출 (7/2, 7/9, 7/16, 7/23, 7/30))

▪ 월간업무보고서 제출 (7/30)

▪ 종료 단계 산출물 작성 및 제출 (4/5~)

- 사업기간 연장 협의로 제출일정 변경

- 1차 제출 및 검토 요청 (7/30)

▪ 중간보고(2차) 준비 및 진행

- 발표 자료 최종안 발송 (7/5)

- 발표 및 시연 준비

- 중간보고 발표 및 시연 (7.8)

▪ 종료단계 감리 시정조치결과 확인 대응

- 감리사와 유선 협의 (문재웅. 7/12, 7/13, 7/14, 7/20)

- 감리 제출 자료 준비 및 제출 (~7/23)

- 유선 인터뷰 (7/26~7/27)

- 남산별관 현장 감리 대응 (7/27)

- 추가자료 작성 및 제출 (7/26~7/27)

- 시정조치확인보고서 수신 및 확인

▪ 추정분담금 산출 검증

- 추정분담금 검증회의 결과 공문 수신 (박광렬. 7/8)

- 보존등기비 취득세 자문 요청 (7/8) 및 자문 회신 (류정동. 7/8)

- 보존등기비 취득세 자문 회신 (김종화, 신민규. 7/13, 7/14)

- 보존등기비 산식 자문 회신 (김종화, 7/19)

- 보존등기비 산식 적용 결과 자료 발송 및 추가 자문 요청 (김종화, 7/22)

- 보존등기비 등 산식 자문 (신민규, 7/28)

-자문사항 산식으로 시뮬레이션진행

▪ 사용자 의견 게시판 관리 (누적 8건)

- 신규 5건 답변 완료

▪ 지역주택, 리모델링주택 관련

- 서울시 자료 재요청 (홍채원, 7/13)

- 리모델링,지주택 적용 안내 제출 (7/16)

- 개발 완료 확인 (7/20)

▪ 정보공개공개서 게시

- 개발 완료 확인 (7/12)

▪ 속도 개선 작업 완료 확인

▪ 서울시 검토결과 반영 확인

- 로고수정, 퀵메뉴 수정 등

▪ 기타 서울시 검토요청사항 대응

▪ 기능개선업무 협의 및 진행경과 보고

- 개발팀 진행 중

- 별첨문서 : 기능개선관리대장

▪ 시범운영 및 시스템전환 일정 관련

- 8월 30일 전환 예정 메일 수신 (7/9)

- 클린업 팝업 수정 (7/9)

▪ 시스템명 투표안 수신 및 협의

▪ 시나리오 기반 매뉴얼 작성

- 사용자등록 방법 등 12종 작성 및 발송 (7/20)

▪ 웹접근성 품질인증마크 획득 관련 협의

- 잔여과업 수행 일정변경 공문 발송 /  서울시 날인 수신 및 확인 (7/20)

▪ 도시계획포털 연계 관련

- 열린데이터광장 자료 비교 및 시스템 적용(199개->308개)

▪ 종료단계 감리 시정조치 결과 확인 대응

▪ 인수테스트계획서 등 제출 (7/16)

▪ 권한체계통합방안 제출 (7/16)

▪ 시스템전환계획서 및 설치보고서 작성 및 발송 (7/20)

▪ 시범운영실적 자료 발송 (7/22)

▪ 주간업무회의 (7/8)

▪ 직원 상주 지원 (구범석, ~8/31)

98%

▪ 산출물 보완 작성 및 제출

▪ EA현행화산출물 등록

▪ 사업 준공 서류 제출

▪ 시범운영 진행

▪ 시스템 전환 준비

▪ 기타 업무 협의

▪ 일정관리 및 통제

▪ 프로젝트 진행 보고

▪ 기능개선관리대장을 기반으로 기능개선 관리

▪ 추정분담금 검증

100%

개발

▪ 요구사항 분석 (필요시 추가 진행)

▪ 종료 단계 산출물 작성

▪ 추가 요구사항 적용

- 기능개선관리대장을 기반으로 기능개선

▪ 서울시 검토결과 반영

▪ 추정분담금 산출 결과 검증 지원

▪ 시범운영 사이트 관리

▪ 시스템 전환 준비

▪ 종료단계 감리 시정조치 결과 확인 자료 준비

98%

▪ 추가 요구사항 개발

- 기능개선관리대장을 기반으로 기능개선

▪ 추정프로그램 산출결과 검증

- 6월 29일 자문회의 결과 반영

- 보존등기비 산출 자료 작성 (7/13)

- 보존등기비 산식 적용 결과 자료 작성  (~7/21)

- 보존등기비 등 산식 자문 (신민규, 7/28)

- 보존등기비 등 산식 적용 (7/28~)

▪ 지주택, 리모델링 정보공개 개발 (6/21~)

- 정보공개 사이트 (7/16 완료)

- 조합업무지원 사이트 (7/16 완료)

- 시/구 관리자 기능개선 (7/20 완료)

▪ 시스템 속도 개선 추가 작업 (~7/9)

- 자금수지보고서 등 개선 완료

▪ 구범석 과장 서울시 상주 (~8/31)

- 소스 업데이트

- 시스템 전환 대비 점검

▪ 시범운영사이트 사용자의견 게시판 관리

▪ 종료단계 감리 시정조치 결과 확인 대응

98%

▪ 추가 요구사항 개발

- 기능개선관리대장을 기반으로 기능개선

▪ 서울시 검토결과 반영

▪ 추정분담금 산출 결과 검증 지원

▪ 시범운영 사이트 관리

▪ 산출물 보완 작성

▪ 시스템 전환 준비

100%

디자인

▪ 종합포털, 정보공개 UI 개선 작업

▪ 종료 단계 산출물 작성

▪ 서울시 검토결과 반영

▪ 디자인 개발 및 퍼블리싱

- 종합포털, 정보공개 UI 개선 및 콘텐츠 작업

▪ 본부장님 보고 자료 디자인

▪ 시스템 전환 준비

▪ 종료단계 감리 시정조치 확인 자료 준비

98%

▪ 중간보고(2차) 보고자료 디자인 작업

▪ 서울시 검토결과 반영

- 로고 변경, 퀵메뉴 변경 등

▪ 클린업시스템 팝업창 디자인

▪ 종료단계 감리 시정조치 결과 확인 대응

98%

▪ 서울시 검토결과 반영

▪ 산출물 보완 작성

100%

미결업무 및 대책

내    용

대책 및 조치사항

▪ 추가 요구사항 반영 필요

- 조합업무지원 사이트 추가 요구사항을 협의하여 반영

- 리모델링 조합을 추가로 포함한 정비사업 프로세스 확대·개선 추가 요구사항을 협의하여 반영

- 정비사업 정보공개서 게시 추가 요구사항 반영

▪ 사업기간 연장 용역변경계약 체결

▪ 추가 요구사항 협의 완료
- 기능개선관리대장.xlsx 관리 실시

▪ 매주 주간업무보고에 포함하여 보고

▪ 정비사업 정보공개서 완료

▪ 지주택,리모델링 완료

협의사항

※ 사업기간 연장 계약 및 추가 요청사항 반영을 위해 진척율 등을 반영하여 기재

* 6/29 회의록

요청사항	처리결과
추정분담금 자문의견으로 산출하여 자문위원들에게 재검토 진행	진행중

▪ 월간 진행 업무 요약

- 2021년 7월 8일 : 중간보고(2차)) / 본부장님 미참석

- 2021년 7월 26일 ~ 28일 : 종료단계 감리 시정조치 결과 확인 대응

- 2921년 7월 30일 : 준공 대비 1차 산출물 제출 및 검토 요청

- 시범운영 / 추가 요구사항 개발 / 시스템 성능 개선

- 추정분담금 산출결과 검증 진행

▪ 향후 일정 요약

- 2021년 8월 13일 : 준공 예정

- 2021년 8월 19일 : 완료보고회 예정 / 미정

- 2021년 8월 30일 : 시스템 전환 예정

산출물

/ 별첨사항

일련번호

내          용

PRJ_01_주간업무현황보고서_20210702_v1.0

PRJ_01_주간업무현황보고서_20210709_v1.0

PRJ_01_주간업무현황보고서_20210716_v1.0

PRJ_01_주간업무현황보고서_20210723_v1.0

PRJ_01_주간업무현황보고서_20210730_v1.0