문서번호	박물관과-8380
결재일자	2021. 8. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한식문화공간조성추진반장	박물관과장
남광연		이병두	08/03 이성은
협조

『삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사』

임목폐기물 처리용역 계약변경 검토보고

2021.  8.

문 화 본 부

(박물관과)

『삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사』

임목폐기물 처리용역 계약변경 검토보고

『삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사』추진 중 임목폐기물 처리 물량 증가에 따른 계약변경 요청이 접수되어 이에 대하여 검토하여 보고함

□ 사업 개요

○ 위    치 : 서울특별시 성북구 대사관로 3외 3필지

○ 용 역 명 : 삼청각 임목폐기물 처리용역

○ 용 역 사 : 푸르움환경, ㈜이건에너지

○ 공사기간 : ’21. 10. 27. ~ ’21. 3. 27.

○ 계약금액 : **********

□ 관련 근거

○ 관련문서

- 『삼청각 일화당 등 시설 개·보수공사』 조경공사 실정보고 검토보고

[박물관과-8004(2021. 7. 26.)]

- 삼청각 임목폐기물 처리용역 계약변경 합의각서 제출

[푸르움환경********3-01호(2021. 8. 3.)]

○ 관련규정

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장 용역계약 일반조건, 제6절 과업내용의 변경과 계약금액 조정

- 임목폐기물 처리용역 과업내용서 설계변경. 1)항

□ 계약변경 사유 및 내용

○ 물량변경 사유

- 조경공사 중 고사목·위험수목 제거 수량 증가 및 잡목제거 수량 증가에 따른 임목폐기물 처리물량 증가

*************

**	**	**	**			**
			**	**	***
*********	**	*	*	**	***	*******
	***	*	**	**	***
	***	*	**	**	***
	***	*	**	**	**
	***	*	*	*	**
	***	*	*	*	**
	***	*	*	*	**
	***	*	*	*	**
	******	*	*	*	**
*******	*	**	***	*****	*****	**********

○ 계약금액 변경내용                                               (단위: 원)

품명	단위	단가	당초		변경		증감액
			수량	금액	수량	금액
*************	***	*****	**	*********	**	*********	**************
********	***	****	**	*******	**	*******	**************
*********				*********		*********	**************
***				*******		*******	**************
****				*********		*********	**************

○ 소요 예산: 1,991천원

- 예산과목 : (균형발전특별회계)박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, 삼청각 리모델링, 시설비및부대비, 시설비

□ 조치의견

○ 관련규정 및 현장 여건에 적합한 것으로 판단되어 상기 보고 내용과 같이 임목 폐기물처리용역 계약변경을 시행하고자 함

붙 임  1. 삼청각 임목폐기물 처리용역 계약변경 요청 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.