설계변경 심의 의견서

부분공개(5)

1.사업명 : 강북통합취수장 염소 투입설비 물품 구매설치

신청 부서명	원수관리과
작 성 자	정정재
제출년월일	2021. 8. 4.

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2021. 8. 5.(목)

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여

아래와 같이 의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위    원

원수관리과장

김종필

08/05

이종근

타당함

위    원

주무관

김종필

김종필

타당함

위    원

주무관

이승수

이승수

타당함

위    원

주무관

이종팔

이종팔

타당함

위    원

주무관

이정호

이정호

타당함

담    당

주무관

정정재

정정재

타당함

설계변경 사유서

□ 사업의 개요

○ 사 업 명 : 강북통합취수장 염소 투입설비 물품 구매설치

○ 사업기간 : 2021. 5. 10. ~ 2021. 8. 8.

○ 계약금액 : 금56,629,600원

○ 계 약 자 : 비드프레소(대표 이종화)

□ 변경사유

○ 설계변경 내역(총괄)

(단위:원)

계약금액	변경금액	감액금액	비고
금56,629,600	금47,817,000	금8,812,600

○ 경비(산재보험료, 고용보험료, 건강보험료, 연금보험료, 산업안전보건관리비, 노인장기요양보험료)를 계약자가 실제로 적용하지 않아 정산(감액)

- 경비(보험료 등) 정산내역

구분	금액(원)		증·감(△) (원)	비고
	당초	변경
산재보험료	269,031	0	△269,031
고용보험료	63,258	0	△63,258
건강보험료	275,897	0	△275,897
연금보험료	361,964	0	△361,964
산업안전보건관리비	153,071	0	△153,071
노인장기요양보험	31,783	0	△31,783
총계	1,155,004	0	△1,155,004

○ 계약물량 중 구의 계열 염소용기 운반용 호이스트 고속운전 방식을 인버터 방식으로 개량하고자 하였으나, 현재 설치되어 있는 LK호이스트 제품이 최근에 생산 중단되어 타사 제품으로 구매 ·설치 할 경우 법정 정기검사에 부적합 하므로 구매·설치를 취소하고 향후 완제품을 구매·설치

- 계약물량 정산내역

물품명	규격	단위	수량	금액(원)		증·감(△) (원)
				당초	변경
총계				6,595,560	0	△6,595,560
호이스트 무선리모콘	동·서·남·북 저속 상·하	개	2	3,348,000	0	△3,348,000
호이스트인버터 콘트롤	2톤용 (설치포함)	식	2	3,247,560	0	△3,247,560

□ 변경 세부내역

구분	금액(원)		증·감(△) (원)	비고
	당초	변경
기자재비	40,552,237	33,956,677	△ 6,595,560
재료비	192,907	192,907	0
노무비	7,271,118	7,271,118	0
산재보험료	269,031	0	△ 269,031
고용보험료	63,258	0	△ 63,258
건강보험료	275,897	0	△ 275,897
연금보험료	361,964	0	△ 361,964
노인장기요양보험	31,783	0	△ 31,783
산업안전보건관리비	153,071	0	△ 153,071
기타경비	417,985	417,985	0
일반관리비	542,220	472,920	△ 69,300
이윤	1,349,984	1,158,393	△ 191,591
공급가액	51,481,455	43,470,000	△ 8,011,455
부가가치세	5,148,145	4,347,000	△ 801,145
총 계	56,629,600	47,817,000	△ 8,812,600

붙임  1. 검증확인서 1부.

2. 정산내역서 1부.  끝