문서번호	교량안전과-12405
결재일자	2021. 8. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기술점검팀장	교량안전과장
신익현	위성환	08/09 조현석
협 조

- 마포대교 안전난간 설치공사 -

실정보고사항 검토 결과보고

2021. 8.

안전총괄실

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 마포대교 안전난간 설치공사-

난간 기초보강 등 작업방법 개선 실정보고

마포대교의 자살방지 난간 확대 설치를 위해 시행중인 설치공사의 현장여건 반영 등에 따른 변경 사항에 대한 실정보고 사항을 검토하여 보고 드림.

※ 관련근거 : 한강교량감 2021-420호(2021.8.4.),-366호(2021.07.12)

Ⅰ		사업 개요

○ 사 업 명 : 마포대교 안전난간 설치공사

○ 규    모 : 안전난간 설치 534.5m

○ 사업기간 : ’20.12.30. ~ ’21.08.31

○ 도급금액 : 999,249천원 (‘20년 재난관리기금)

○ 시 공 사 : ㈜삼일아이엠

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단(한강교량건설사업관리단)

Ⅱ		추진 경과

○ ’19.09.06. ~ ’20.09.28. : 실시설계용역 시행

○ ’20.12.30. : 공사계약 및 착공

○ ’21.07.16. : 534.5m중 414.5m 설치완료(잔여 120.0m)

Ⅲ		사업비 현황

(단위 : 천원)

구 분	사 업 비	도 급 비	관 급 비	이 전 비
금 액	999,249	999,249	-	-

Ⅳ		건설사업관리단 실정보고

□ 보고내용

○ 관련근거

- 지방자치단체입찰 및 계약집행기준 공사계약일반조건 제 6절(공사설계변경)

- 건설공사 사업관리 방식 검토기준 및 업무수행지침 제 97조(설계변경 관리)

- 공사계약일반조건 제 19조 (설계변경 등) 및 19조 5항

○ 실정보고 현황

1. 강재 난간 기초 플레이트 보강 및 스터드볼트 규격 변경

- 목적 : 마포대교 북단의 강재 연석과 남단 콘크리트 연석의 높이차로 인한 안전난간의 기능유지를 위해 기초부 플레이트 보강하여 자살방지 난간의 기능유지

- 변경내용 : 사업비 변경 없음

※ ********************************************

구분	당 초	변 경		보강상세
개요도
난간 높이	설 계		시 공
	***************************		**************************************
변경 내용	마포대교 북단의 연석부(강재) 높이가 설계와 상이하여 설계에 반영된 자살방지 난간의 기능 유지를 위한 최소높이 확보를 위한 기초부 보강

2. 낙하물방지공(안전시설) 설치방법 개선

- 목적 : 당초 설계에 반영되어 있는 방호선반(낙하물방지) 설치를 위한 자동차 전용도로의(강변북로) 교통통제 등에 따른 시민불편 사항을 최소화 하고자 설치 방법을 개선하여 설치방법 변경

- 변경내용 : 감 2,740천원

※ 당초 : *****************************

변경 : *****************************

구분	당 초	변 경
개요도
변경 내용	클램프와 와이어를 이용하여 교량 상부 시공으로 시공위치와 방법을 변경하여 강변북로 교통 차단과 한강공원 보도/자전거 이용자의 통행 불편을 최소화

3. 설치구간 보완 실측 수량 및 제경비, 기술사용료 등 반영

- 안전난간의 TYPE별 설치 구간의 실측결과 교량 단부의 기존난간 단부까지의 구간을 반영하여 설치하고 기술개발자의 직접시공 참여에 따른 기술사용료 변경 등 반영

- 변경내용 : 설치경간 조정 및 기술사용료, 제경비 등 조정

※ 조정 내용 1) ***************************************

2) **********************************************

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 안전난간의 기능확보를 위한 높이의(H=1.65m) 확보 위한 기초 보강 및 낙하물방지공 위치 및 시공방법 변경, 제경비 정산 및 실측 수량의 반영 등에 따른 조정이 필요 함.

Ⅴ		검 토 결 과

○ 검토의견

- 사용자의 안전성 확보와 안전난간의 자살방지 기능의 확보를 위해 기초를 보강하여 설계시 계획된 높이를( H=1.65m) 확보하고,

- 낙하물방지공의 개선 설치를 통해 시공중의 안전성을 확보와 시민불편을  최소화는 개선 방안을 적용함이 타당한 것으로 사료됨

Ⅵ		조치 계획

○ 건설사업관리단의 검토내용을 확인한 결과, 안전난간 제작 및 설치 목적이 자살을 방지하고 안전사고에 대한 위험 요소들을 사전에 개선하기 위한 책임건설사업관리기술자의 의견이 적정한 것으로 판단되어 승인통보 하여 설계변경시 정산 반영토록 조치하고자 함

- 승인내용

․ 강재 난간 기초 플레이트 보강 및 스터드볼트 규격 변경

․ 낙하물방지공 위치 및 시공방법 개선과 현장실측 수량 반영 등

․ 변경내용 반영 : 추후 설계 변경시 정산 반영

- 공사비 증감현황

공 종	단위	수량	공 사 비			비고
			당 초	변 경	증·감
1. 마포대교 안전난간 설치공사	식	1	***********	***********	**********
순공사비			***********	***********	**********
2. 제 경 비	식	1	***********	***********	***********
총 원 가			***********	***********	*********
3. 고용개선지원비(PS단가)	식	1	**********	**********	*******
4. 기술사용료	식	1	**********	*	***********
5. 폐기물처리비	식	1	*	*	*
공급가액			***********	***********	***********
6. 부가가치세	식	1	**********	**********	**********
도 급 액			***********	***********	***********

붙임 : 건설사업관리단 검토의견 및 관련공문 각 1부.  끝.