문서번호	운영과-5555
결재일자	2021. 8. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
김성준		代정재훈	08/09 백기영
협 조
	주무관			강성수
	주무관			신종진
	주무관			박근배
	주무관			이창희

북서울미술관 냉각탑 제조물품 반입계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 8.

북서울미술관

(운영과)

북서울미술관 냉각탑 제조물품 반입계획

우리 미술관 수장고 냉방 열원인 스크류냉동기 연동 냉각탑 교번운전을 위한 냉각탑 추가사업과 관련하여, 현장조립 물품인 냉각탑의 반입 일정을 보고드림.

□ 추진배경

〇 변경계약 체결 알림[2021 북서울미술관 냉각탑(현장조립) 제조구매]

(총무과-7749호, 2021.7.21.)

〇 착공승인 알림(2021 북서울미술관 냉각탑배관 설치공사)

(운영과-5488호, 2021.8.5.)

□ 사업개요

〇 목 적: 수장고의 안정적인 항온항습을 위한 예비 냉각탑 장비추가

〇 계약현황

- 설계: 2021 북서울미술관 냉각탑 설치 실시설계 용역(4.16. 납품완료)

- 물품: 2021 북서울미술관 냉각탑(현장조립) 제조구매(‘21.6.9.~8.24.)

- 공사: 2021 북서울미술관 냉각탑배관 설치공사(‘21.8.3.~10.1.)

〇 소요예산: *********(단위사업 시설비 예산배정액: 83,700천원)

※ 설계(********), 제조물품 구매(*********), 공사(*********)

□ 반입계획

〇 구매품명: 직교류 밀폐형 냉각탑 80CRT

- 분리반입규격: 하부(2,100×4,100×200mm) 1개, 상부(1,950×350×700) 8개

〇 반입일자: 2021. 8. 23.

- 주요일정

시 간	내 용
09:00 ~ 10:00	냉각탑 및 지게차(7.5톤, 2.1m) 현장도착
10:00 ~ 12:00	냉각탑 상·하부 반입(지게차 및 체인블럭 사용)
13:00 ~ 14:30	냉각탑 상부 반입 및 조립품질 확인

〇 현장대리인: ************

- 자 격: 금속재료산업기사, 열처리기능사

□ 협조요청

〇 냉각탑실 바닥 기초공사 실시(물품반입전까지)

〇 냉각탑 상·하부 반입동안 주차장 통제 실시(8.23, 9:10~11:00)

- 사유: 냉각탑 반입을 위해 지게차(7.5톤, 2.1m) 주차장 램프 사용필요

〇 1층 옥외 냉각탑실 환기창 철거 실시(물품반입전까지)

※ 향후 설비 유지관리시, 자재반입 용이성을 위해 기존 고정창에서 폴딩도어로 교체

- 사유: 냉각탑실 문 규격이 700×2,300mm으로 설비 주요부품 교체가 어려움

*	*
냉각탑 현장반입 계획도	냉각탑실 반입공간 현장사진

□ 향후계획

〇 냉각탑배관 설치공사(~10.1.)

〇 자동제어 및 전기인입 공사(냉각탑 부속품: 순환펌프, 팬, 열선)

- 자동제어 규격: 자동제어 6개소(냉각탑 부속품에 대하여 입·출력 제어)

- 전기인입 규격: 비상전력 5.5kW×4P, 3.7kW 및 5kW

붙임  1. 냉각탑 반입계획서 1부.

2. 물품반입 현장대리인계 1부.  끝.