(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 건설공사 1공구

공사개요

· 위    치: 양천구 화곡고가사거리~
양천구 신정동 1060

· 규    모: 지하차도 신설 1.09km,
진출입연결로 2개소 외

· 공사기간: *********************************************

· 도 급 비: ***********************

· 시공사: ***************

· 감리단: *********

· 설계사: ********

실정보고 건명

지장수목 이식 및 제거 실정보고

실정보고 사유

- 제3차도시림등의 조성관련 심의위원회 결과(가로수 이식 및 제거) 및 서울
시설공단 협의 결과 반영(관목, 원추리 이식 및 제거)

- 중앙녹지대 구간의 관목, 초화류의 철거 및 이식, 임목폐기물 처리수량이 설계 미반영

- 광역상수도 구간 가로수 추가 저촉 발생

건설사업관리단

검토의견

- 지장수목 이식 및 철거 협의 결과 내용에 따라 적정하게 적용되었으며,

- 단가 적용은 기존단가와 신규단가(협의율)가 적절하게 적용됨

공기에 미치는 영향

해당없음

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	**************** ********* *********** ******** *********	****************** *************** ********* ************* **************	********************* ****************** ************** **************** *****************
금액	*********	*********	************

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ◯ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

해당없음

발주처

검토의견

- 실정보고 사유에 따른 지장수목 이식 및 제거 실정보고는 적정하며,
실정보고 승인통보 후 설계변경에 반영코자 함

비 고

결재

주무관

노진우

방재시설과장

김태중

방재시설부장

08/09

박홍봉

협조