“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	도로관리과-16082		★주무관	도로계획팀장		도로관리과장		안전교통국장
			조명철	염태웅		이한규		08/09 정제호
등록일자	2021.8.6.
결재일자	2021.8.9.
공개구분	대시민공개
			협조자		행정국장		양미영
					재무과장		지영애
					계약팀장		代김성하

주민 통행불편 해소와 안전사고 예방을 위한 -

2021년 2차 추경 도로정비사업 시행 계획

사업현황

대상사업 : 총 2건(단가계약사업 1건, 단위사업 1건)

※ 보도 유지보수사업 시행 계획은 별도 방침 수립 예정

총사업비 : 금2,147,139천원

시행계획

설계변경 : 단가계약사업 1건(도로시설물 유지보수공사)

- 각종 도로시설물(보도육교, 방호울타리 등)의 신속한 민원처리를 위하여

기존 시행중인 연간단가공사의 설계변경에 반영하여 시행

별도발주 : 단위사업 1건(역삼로 창업가거리 보도정비공사)

- 가로수, 보도블록 교체 등을 통해 대한민국 대표 창업가 거리에 걸맞는

환경을 조성하기 위한 역삼로 창업가거리 보도정비공사는 별도 발주시행

향후계획

’21. 8. : 일상감사(→감사담당관), 계약심사(→재무과) 및 공사 발주

’21. 9.~’22. 8 : 공사착수 및 시행

	강 남 구
(		도로관리과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조 • 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제74조 • 2021년 제2회 추가경정예산 고시(제2021-126호, ’21. 7. 23.)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 도로 및 도로시설물 유지관리 및 정비를 위한 2021년 2차 추경예산 확보
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 예산확보 완료
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 관내 구민 전체
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

- 주민 통행불편 해소와 안전사고 예방을 위한 -

2021년 2차 추경 도로정비사업 시행 계획

2021년 2차 추경 예산사업으로 확정된 도로 및 도로시설물 정비사업에 대하여 아래와 같이 사업 시행하여 주민통행 불편을 해소하고 안전사고를 예방하고자 함.

Ⅰ		사 업 현 황

□ 대상사업 : 총 2건 (금2,147,139천원)

※ 보도 유지보수사업 시행 계획은 별도 방침수립 예정

구분	사 업 명	추경예산액 (천원)	사 업 개 요	비고
계		2,147,139
1	도로시설물 유지보수공사	1,047,180	❍ 방호울타리 250경간 및 도로반사경 150개 정비 ❍ 과속방지턱 도색 4,000㎡ 등	연간 단가
2	역삼로 창업가거리 보도정비공사	1,099,959	❍ 화강판석 포장 33.6a ❍ 측구 1,120m 및 경계석 정비 820m 등	단위 사업

	【2021년 본예산】도로시설물 유지보수공사(연간단가) 현황
▶ 공 사 명 : 2021년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) ▶ 위 치 : 관내 전지역 ▶ 사업규모 : 도로시설물 세척 50,000㎡, 방호울타리 보수 300경간, 도로반사경 정비 300개, 과속방지턱 도색 9,200㎡ 등 ▶ 공사기간 : 2021. 3. 12. ~ 2021. 12. 31. ▶ 총공사비 : 금1,845,000천원 - 도급비 1,693,157천원, 관급비 148,686천원, 이전비 3,157천원 ▶ 도 급 사 : 원스텝건설(주) 대표 강정식

Ⅱ		추 진 계 획

□ 공사시행 방법

❍ 설계변경 시행(1건) : 도로시설물 유지보수공사(연간단가)

- 각종 도로시설물(보도육교, 방호울타리 등)의 신속한 민원처리를 위해 기존에 시행 중인 연간단가공사의 설계변경에 반영하여 공사 시행

- 설계변경에 따른 총공사비 및 주요 시공물량 증가 내역

· 총공사비 : [당초] 금1,845,000천원 → [변경] 금2,892,180천원

· 주요 시공물량

연번	구 분	단 위	수 량
			당 초	변 경	증가량
1	도로시설물 세척	㎡	50,000	70,000	20,000
2	방호울타리 보수	경간	300	550	250
3	도로반사경 정비	개소	300	450	150
4	과속방지턱 도색	㎡	9,200	13,200	4,000

❍ 별도발주 시행(1건) : 역삼로 창업가거리 보도정비공사

- 가로수, 보도블록 교체 등을 통해 대한민국 대표 창업가 거리에 걸맞는

환경을 조성하기 위한 역삼로 창업가거리 보도정비공사는 별도 발주시행

- 세부계획 :「붙임」발주 계획서 참조

※ 폐기물처리는 기 시행중인 건설폐기물처리 용역에 설계변경 반영 시행

Ⅲ		향후계획 및 행정사항

□ 향후계획

❍ ’21. 8.         : 일상감사, 계약심사 및 공사발주

❍ ’21. 9.~’22. 8. : 공사착수 및 시행

※ 설계변경 시행공사(연간단가사업)는 향후 설계변경 시 반영 및 ’21년 말 준공

□ 행정사항

❍ 감사담당관 : 일상감사

❍ 재  무  과 : 계약심사, 공사 입찰 및 계약체결

붙임  역삼로 창업가거리 보도정비사업 발주 계획서 1부.  끝.