투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	용역 중지 통보[탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 기본 및 실시설계 감리용역]

1. 동남권사업과-524호(2021.8.5.) 및 토목부-15159호(2021.8.6.) 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행중인 「탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 기본 및 실시설계 감리용역」의 용역 일시중지에 대해 검토하고, 그 결과를 통보합니다.

가. 용 역 명 : 탄천·한강변정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계 건설사업관리

(설계감리)용역

나. 용역기간 : '20. 11. 2. ~ '21. 11. 1.

다. 용역금액 : 353,602천원

라. 중지기간 : '21. 8. 2.~ '21.12.31.

마. 중지사유 :『탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 신설 설계용역』일시중지에 따른

후속조치

붙임  관련방침 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	총무부장,(주)유신
주무관	김성렬		토목설계과장	한병찬		토목부장	08/06 임춘근
협조자
시행	토목부-15222	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 10층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7144	/전송	02-772-7304	/	ksy8932@seoul.go.kr	/	부분공개(5)