문서번호	토목부-15159
결재일자	2021. 8. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
김성렬		한병찬	08/06 임춘근
협조

건설사업관리 용역 일시중지 검토보고

≪탄천·한강변 정비 및 보행교 기본 및 실시설계 감리용역≫

2021. 8.

도시기반시설본부

(토   목   부)

- 탄천·한강변 정비 및 보행교 기본 및 실시설계 감리용역 -

용역일시중지 검토보고

동남권사업과에서 시행 중인「탄천·한강변 정비 및 탄천 보행교 신설 설계용역」일시 중지 통보가 있어 이에 대한 검토 사항을 보고 드림.

□ 관련근거

○ ‘탄천·한강변정비 및 탄천보행교 신설 설계용역□일시정지 통보

- 동남권사업과 - 524호(2021.8.5.)

▷ 도로개선사업 기본설계(안) 보완방향 결정전까지 과업진행 정지

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 탄천한강변정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계 건설

사업관리(설계감리)용역

○ 개    요 : 강변정비(국제교류복합지구 주변 탄천·한강 합수부일대 63만㎡)

탄천보행교 신설(폭 15m, 연장 280m)

○ 용역기간 : '20. 11. 2. ~ '21. 11. 1.

○ 계약금액 : 353,602천원

○ 용 역 자 : ㈜유신 외 2개사

□ 보고내용

○ 동남권사업과에서 발주 계약하여 진행 중인「탄천·한강변 정비 및 탄천 보행교 신설 설계용역」과 연계하여 동 사업의 건설사업관리(설계감리) 용역을 우리 부에서 진행 중이나

○ 설계 용역이 일시 중지 통보됨에 따라 우리 부 건설사업관리(설계감리)용역에 대한 일시 중지 등 후속 업무 추진이 필요함.

□ 검토의견 및 조치계획

○ 상기와 같은 사유로 우리 부에서 추진 중인 건설사업관리 용역에 대해 추후 동남권사업과에서 기본설계(안)확정 등 별도 통보시까지 일시 중지코자 하며

○ 동 내용을 계약상대자에 통보하여 건설사업관리에 만전을 기하고자 함

- 건설사업관리 일지중지

▷ 기 간 : ’21. 8. 2. ~ '21.12.31.까지(152일)

▷ 사 유 : 도로개선사업 기본설계(안) 보완방향 결정전까지 일시중지

붙  임  : 관련 공문 각 1 부.  끝.