문서번호	생산관리과-7921
결재일자	2021. 8. 6.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
김영규		代이규현	08/06 서대훈
협 조
	주무관			이규현
	주무관			권창범
	주무관			라승보
	주무관			김진수

-영등포아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 관련-

용역 중간보고회 개최 계획 보고

2021. 8.

생 산 부

-영등포아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 관련-

용역 착수보고회 개최 계획 보고

영등포정수센터 시설물 안전진단 용역의 중간보고회를 개최하여 진행사항 및 추진내용 등을 점검코자 함

Ⅰ				용역개요

□ 용 역 명 : 영등포아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역

□ 용역기간 : 2021.2.15.(월) ∼ 12.31.(금)

□ 용역금액 : 금172,166천원

□ 용 역 사 : 2개사(반석안전, 대한산업안전협회)

□ 과업시설

○ 정수시설

구 분		위 치	설치 일자	규 모	비고
정수장	1정수장	영등포구 노들로 11	1992	Q = 30만㎥/일
	2정수장		2010	Q = 30만㎥/일
취수장	풍납	송파구 올림픽로41길 108	1991	Q = 70만㎥/일
건 축	정수장	영등포구 노들로 11	1992,2010	42,847㎡	연면적
	취수장	송파구 올림픽로41길 108	1991	2,661㎡	연면적

○ 관  로

구 분	구 격	연장	비고
도송수 및 구내관로	D=1,650~2,200㎜	2,643m
고도관로	D=900~2,800㎜	1,607m
공업용수	D=200~1,000㎜	468m	센터 외부 포함 (D=200~1,000㎜, L=7,200m)
계	D=200~2,800㎜	4,718m

Ⅱ				중간보고회(안)

□ 일  시 : 2021.8.10.(화) 15:00~  (예정)

□ 장  소 : 본부 4층 회의실

□ 보고자 : 사업책임기술자(배태호 부사장)

□ 참석자

○ 본  부 : 부본부장, 생산부장, 생산관리과장, 기전설비과장

○ 센  터 : 정수시설과장, 시설담당

○ 용역사 : 사업책임기술자, 분야별 책임기술자(3)

○ 기  타 : 코로나-19 수도권 4단계 적용(7.12일)으로 참석인원 최소화

※ 외부자문위원, 전차 안전진단 책임기술자 참여는 취소, 향후 최종보고회에 참여

□ 보고내용

○ 과업의 개요 : 과업현황, 과업위치 및 시설현황, 진단 및 점검이력 등

○ 현장조사 결과 : 주요손상현황, 현장시험결과, 시설물 조사결과55

○ 상태평가 및 안전성 검토 : 상태평가, 안전성 검토

○ 중요사항 진행내용 : 착수보고회시 요청내용, 손상 내용 3D 구축 현황

○ 향후 계획 : 최종자문회의 개최 및 기술심의 요청 등

□ 진행순서

진행 시간	소요시간	진행 순서	비고
15:00~15:05	05‘	용역 개최 보고	생산관리과장
15:05~15:10	05‘	부본부장 인사 말씀
15:10~15:40	30‘	용역 진행사항 및 향후 계획 보고	책임기술자
15:40~16:00	20‘	질의 응답 및 토론
16:00~16:10	10‘	부본부장 당부 말씀

Ⅲ				행정사항

□ 중간보고회 내용 검토 및 반영

○ 중간보고회 검토 사항 및 보완 내용은 최종보고회에 보고

○ 용역보고서에 반영

□ 향후 일정

○ 현장 조사 보완 및 추가 시행	(8월 30일)

○ 시설물 상태평가, 안전성 평가 및 용역보고서 초안 작성	(9월 20일)

○ 용역 최종 자문회의 개최	(9월 30일)

○ 기술심의 신청 및 기술심의회 개최	(10월 30일)

○ 기술심의 내용 보완, 최종 용역보고서 작성	(11월 30일)

○ 용역 준공처리	(12월 20일)

붙임 : 중간보고자료(초안) 1부.  끝.