“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사변경계약체결[상수도사업본부 청사 옥상 차열방수공사]

1. 총무과-11718(2021.08.06.)호와 관련입니다.

2. “상수도사업본부 청사 옥상 차열방수공사”건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결코자 합니다.

가. 당초 계약내용

- 건    명 : 상수도사업본부 청사 옥상 차열방수공사

- 계 약 자 : ***************

- 계약기간 : 2021.07.20. ~ 2021.08.13.

- 계약금액 : ****************************

나. 변경 계약내용 : 계약금액 변경

구분	당 초	변 경	증 ․ 감내역
계약금액	***********	***********	************

다. 변경사유 : 방수공사 공종 추가에 따른 공사물량 증가

라. 조치사항 : 변경사항에 따른 관련 서류(계약보증서, 합의서 등) 검토 후 계약체결

붙임 : 1. 공사변경계약서(초안) 1부.

2. 변경계약합의서 등 변경계약의뢰 문서 각 1부.  끝.

주무관	김민		재무회계과장	이민제		요금관리부장	08/10 안병희
협조자
시행	재무회계과-9819	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1234	/전송		/	gorilla@seoul.go.kr	/	부분공개(5)