코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(지역형 물순환자원화센터 설치 기본계획 수립 용역)

1. 물재생시설과-8793(2021. 8. 9.)호와 관련입니다.

2.「지역형 물순환자원화센터 설치 기본계획 수립 용역」에 대하여 아래와 같이 준공   기한을 연기 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용  역  명 : 지역형 물순환자원화센터 설치 기본계획 수립

나. 계약상대자 : ㈜태조엔지니어링 외 2개사

다. 계약기간 변경(※ 계약금액 변동 없음)

구 분	당 초	변 경
계약기간	2020. 9. 4. ~ 2021. 9. 3.	2020. 9. 4. ~ 2021. 12. 31.

라. 지체상금 : 미부과

*********************************************************************

붙임  1. 준공기한 연기 보고서 1부

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

							물재생시설과장
주무관							태상필			물재생기획팀장					조장환					물재생시설과장					08/10 代조장환
협조자				계약1팀장						代정호욱
시행			물재생시설과-8806									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)															/
전화		02-2133-3828						/전송			02-2133-1043					/	tspegl@seoul.go.kr												/	부분공개(5)