문서번호	급수운영과-13587
결재일자	2021. 8. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	북부수도사업소장
박상권		이승완	08/11 박동석
협조
	급수관리팀장		최용진

「월계배수지(3지) 내부방식공사」

공사관계자 소통 간담회 결과보고

2021. 8.

북부수도사업소

[급수운영과]

『월계배수지(3지) 내부방식공사』

공사 관계자 소통 간담회 결과보고

우리사업소에서 시행중인 『월계배수지(3지) 내부방식공사와 관련, 공사관계자 소통 간담회를 아래와 같이 개최하고 그 결과를 보고 드림.

공사개요

❍ 공 사 명 : 월계배수지(3지) 내부방식공사

❍ 기    간 : ’21. 5. 24.~’21. 12. 31.

❍ 도 급 비 : 861백만 원

❍ 시 공 사 : GS성신건설㈜

❍ 감 독 자 : 서울시설공단 공사감독2처 상수도2팀(감독 ****

❍ 주요공정

- 도막방식 ; 10,634㎡(티오켐(주)) - 패널방식 : 3,793㎡((주)세진SMC)

- 그라인딩 : 10,109㎡             - 폼타이제거 : 5,000개

간담회 개최

❍ 일  시 : 2021년 8월 9일(월) 14시

❍ 장  소 : 북부수도사업소 2층 소장실

❍ 참석자 : 북부수도사업소장, 급수운영과장, 급수관리팀장

서울시설공단 팀장*****

GS성신건설(주) 대표이사*****, 전무*****외 1인

※ *** 공사감독은 코로나19 접촉자로 회의에 불참

❍ 간담회 주제

- 공사장 안전관리 및 부진공정(공정율 20%) 만회 대책

개최 결과

❍ 북부수도사업소장

- 공단, 사업소에서는 시공사 애로사항  반영 검토

- 밀폐공간 인력관리 철저

❍ 급수운영과장

- 폭염시 휴식시간 준수

- 분진발생 추가 보완토록 조치

❍ 공단팀장

- 단면복구 후 충분한 양생기간 필요

❍ 시공사

- 작업장 소량발생 건설폐기물 잔재처리 요청

- 미진한 공정 만회대책을 위한 인력추가 확보 투입 예정

- 선 안전조치 후 시공에 역점을 둘것임

붙 임 : 월계배수지 내부방식공사 부진공정 만회대책