문서번호	방재시설부-10565
결재일자	2021. 8. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이시연		김태중	08/11 박홍봉
협 조

「신상도 지하차도 확장공사」

설계변경(총차 12회, 8차 1회) 검토 보고

2021.8.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「신상도 지하차도 확장공사」

설계변경(총차 12회, 8차 1회) 검토 보고

「신상도 지하차도 확장공사」관련 제8회 물가변동에 따른 계약금액 조정사항을 반영한 설계변경(총차 12회, 8차 1회)에 대하여 검토 보고드림.

※ 관련문서 : 극동(건사) 21-1136호(2021.8.4.)

Ⅰ		공사 개요

❍ 위    치 : 동작구 상도동 159-21~207-5

❍ 규    모 : 도로 확장 2차로 → 4～6차로, 연장 324m

(지하차도 확장 2차로 → 4차로, 연장 221m)

❍ 공사기간 : `07.12.31.~`21.12.31.(8차 `21.3.1.~`21.8.31.)

❍ 도 급 비 : 18,773,590천원(8차 3,342,000천원)

❍ 도 급 사 : (유)한백종합건설 외 1개사

❍ 건설사업관리단 : 극동엔지니어링(주) 외 2개사

Ⅱ		보고 내용

▢ 설계변경 검토

❍ 총차 12회 변경사유

- 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제8회) 반영(방재시설부-9258, 2021.7.13.)

❍ 8차 1회 변경사유

- 총차 물량 내 차수 공사 물량 조정

❍ 공사비 증·감 현황(※ 공사기간 변경 없음)

(단위 : 백만원)

구 분	총차 12회			8차 1회
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
직접공사비	14,139	14,260	121	2,501	2,588	87
제 경 비	2,586	2,607	21	521	435	87
제경비 제외	342	342	-	15	15	-
공급가액	17,067	17,209	142	3,038	3,038	-
부가가치세	1,707	1,721	14	304	304	-
도 급 비	18,774	18,930	156	3,342	3,342	-
관급자재비	1,541	1,541	-	358	235	123
총 공 사 비	20,315	20,471	156	3,700	3,577	123

Ⅲ		책임건설사업관리기술자 검토의견

❍ 기 승인된 제8회 물가변동에 따른 계약금액 조정 및 총차 물량 내 차수물량 조정사항을 반영하여 설계변경함이 타당하다고 판단됨

Ⅳ		보고자 의견 및 조치계획

❍ 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경도서가 적정하게 작성된 바, 설계변경 시행 및 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함

붙임  설계변경 설계서 1부.  끝.