문서번호	시설보수과-6121
결재일자	2021. 8. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
이철형		김준섭	08/11 차창훈
협 조
	주무관			신동헌

봉천천복개 보수공사

실 정 보 고

2021.  8.

남부도로사업소

시설보수과

봉천천복개 보수공사 실정보고

『봉천천복개 보수공사』현장점검 시 지적된 손상부(민원요청사항)에 대한 조치계획 보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 봉천천복개 보수공사

○ 공사기간 : 2021. 4.30. ~ 10.26.

○ 공사개요 : 아스팔트포장 38.9a, 교면방수 3,898㎡

신축이음 보수 119.8m, 단면보수 297.5㎡ 등

○ 도급금액 : ************

○ 도 급 자 : 주식회사 웅산건설산업

○ 예산현황

(단위 : 천원)

총예산	도급비	관급자재	이설비 (폐기물)	계약심사 절감액	집행잔액
*******	*******	******	******	***	******

□ 보고내용

○ 봉천천복개는 평소 차량 통행량이 많은 복개구조물로 일부구간 신축이음 및 포장 파손이 빈번이 발생되고 있으며, 특히 봉천로 434(Joint91~Joint92) 구간은 기동반 응급복구 후 Joint 재파손으로 인한 민원이 빈번이 발생하고 있어 정비가 필요한 실정임.

현황사진

□ 검토의견

○ 통행불편 민원사항 해소, 안전사고 예방 및 시설물 내구성 확보를 위해 포장 및 신축이음에 대한 추가 정비가 필요함.

○ 상기구간 신축이음은 현재 실란트 계열로 설치되어 있으나, 복개구조물의 신축 유간이 적고, 중차량 및 여름철 고온 등으로 파손이 빈번하게 발생하고 있어 파손구간 정비 시 매립형 신축이음 설치가 필요하다고 사료됨.

○ 추가보수내역

- 아스콘 포장 및 방수 : 4.03a

- 신축이음 정비(매립형) : 19.2m

- 추가소요예산 : ********

(******************************************)

□ 조치계획

○ 상기 사항은 시설물의 기능향상 및 쾌적한 도로환경조성을 위해 필요한 사항으로『봉천천복개 보수공사』집행잔액을 활용, 예산의 범위내에서 시공사에 보수토록 추가 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 추가작업 개략공사비 및 위치도 1부.  끝.