문서번호	전시과-5181
결재일자	2021. 8. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전시과장	서울시립과학관장
이진원		이현배	08/11 이정규
협조

- 서울시립과학관 2021년 신규 체험전시물 제작·설치 -

설계보고회 개최 결과보고

2021. 08.

서울시립과학관

(전   시   과)

- 서울시립과학관 2021년 신규 체험전시물 제작·설치 -

설계보고회 개최 결과보고

「서울시립과학관 2021년 신규 체험전시물 제작·설치」사업의 전시설계를 완료하고, 보고회를 개최하여 그 결과를 보고드림

□ 추 진 근 거

○「2021년 신규 체험전시물」제작설치 추진계획(전시과-1972, 2021.3.24.)

□ 사 업 개 요

○ 계 약 명 : 서울시립과학관 2021년 신규 체험전시물 제작·설치

○ 계약금액 : 일금이억육천일백만원정(일금261,000,000원정)

○ 계약일자 : 2021.05.28.(준공일 : 2020.10.31.)

○ 계약업체 : ㈜전시과학

□ 설계보고회 개최개요

○ 일    시 : 2021. 8. 3.(화) 10:00~11:50

○ 장    소 : 과학관 열린방(2층)

○ 참 석 자 : 총 7명

- 과 학 관 : 전시과장, 이진원, 신지혜 주무관, 엄정용 실무관

- 계약업체 : **********************

○ 보고내용

- 과업 착수 후 총 5차례에 걸친 협의를 통해 도출한 전시 설계안 보고

∙ 신규전시물의 공간 연출 계획 및 전시실 내 배치 계획

∙ 개별 전시물에 대한 체험방법 및 연출 계획

- 향후 과업추진 일정 보고 및 협의

∙ 설계 완료 및 전시물 제작 착수 일정 조정

∙ 이동형 전시물 제작 일정 및 과업 준공 일정 협의

□ 보고회 주요내용(붙임 1, 2 참조)

○ 전시실별 전시물 설치 계획

전시실명	전시물 수	전 시 물 명
G전시실	3종	공기대포를 쏘면, 물고기를 위에서 관찰하면, 생물을 분류 해보면
O전시실	2종	심장박동을 들어보면, 선스펙트럼으로 본 주기율표
B전시실	2종	춤추는 액체자석의 비밀은, 천문의기전시
R전시실	1종	공기는 어떻게 흐를까?
이동형 전시물	6종	【모든 사물의 역사(병원)】 엑스선 촬영장치, 심전도계, 인공신장기, 흡인기, 혈압계, 보육기

※ 천문의기전시는 천문대 인근 야외전시도 동시 추진

○ 개별 전시물의 설계보고안에 대한 추가조정 요청

- ‘공기대포를 쏘면’ 전시물의 하부 바퀴살 디자인 수정

- ‘물고기를 위에서 관찰하면’ 전시물의 골격염색표본 전시매체 조정

- ‘춤추는 액체자석의 비밀은’ 전시물의 체험방법 조정

- ‘천문의기 실내전시’는 쇼케이스 형태 변경

- ‘이동형 전시물’ 6종에 대한 세부연출사항 조정

○ 과업추진 일정 협의

- `21.8.13.(금)까지 설계 확정 후 제작·설치 착수

- 이동형 전시물의 경우 과업준공일보다 앞선 10월 첫째주 제작 완료 추진

□ 향 후 계 획

○ `21.   8. 13.限 : 설계도서 제출(설계보고 내용 중 조정부분 반영)

○ `21. 10.  8.   : 이동형 전시물(6종) 제작 완료

○ `21. 10. 22.   : 잔여 전시물 제작 및 설치 완료

○ `21. 10. 31.   : 전시물 시운전(잔손보기) 및 과업준공

○ `21. 11.   5.   : 준공검사 및 대금지급

붙임 1. 설계보고 자료 1부.

2. 설계보고회 희의록 1부.  끝.