문서번호	교량안전과-12645
결재일자	2021. 8. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
김태형		민형일	08/12 조현석
협조

「서울로 7017 엘리베이터 설치 전기공사」

설계변경(1회)시행 검토 보고

2021. 08.

안전총괄실

(교량안전과)

「서울로 7017 엘리베이터 설치 전기공사」

설계변경(1회)시행 검토 보고

『서울로 7017 엘리베이터 설치 전기공사』설계변경 사항에 대한 책임건설사업 관리기술인 검토 의견서가 제출되었기에 내용을 검토하고 그 결과를 보고드림.

1		관련근거

□ 공사계약 일반조건 제19조(설계변경 등)

(기획재정부예규 제441호, 2019.6.1.)

□ 설계변경 현황(1회)검토보고(제일 2021-2729호, ‘21.08.11)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 서울로 7017 엘리베이터 설치 전기공사

□ 공사기간 : ‘21.03.15. ~ ’21.09.10

□ 도 급 자 : ***************

□ 도 급 비 : *********

□ 공사개요 : 전력설비공사 1식

3		설계변경 주요내용

□ 공사 물량 증.감 반영

□ 신규공종 협의단가 적용

○ 공사계약 일반조건 제20조에 의거 신규비목에 대하여 협의단가 적용

- 물량 증·감 : 계약단가 적용

- 신 규 비 목 : 낙찰율 적용(설계변경당시 산정한 단가에 낙찰률 협의 적용 함)

□ 건강보험, 국민연금보험, 고용개선지원비 등 제경비 변경

□ 주요 공종별 물량 증·감 내역

*****	*****	**	***	***	***	***
***	****	*	*	*	**	*****************
********** *******	********	*	**	*	***
	*********	*	*	**	**

4		설계변경 검토 결과

□ 책임건설사업관리기술자 의견

○ 설계변경사항

- 주요수량 및 공사비 : 적정, - 제경비 변경 : 적정

(건강보험, 국민연금보험, 고용개선지원비 등 )

○ 설계변경 적용단가

- 기존비목 : 계약단가 적용, - 신규비목 : 낙찰율 (87.748%) 적용

□ 공사비 증·감 내역

(단위:원)

********	*****	****	*****		***
****	***********	***********	*	*********
*****	**********	**********	*	*********
*****	**********	**********

5		조치의견

□ 상기 검토결과와 같이 건설사업관리단에서 보고한 설계변경은 적정한 것으로 판단되므로 설계변경하고 변경계약 시행하고자 함

붙 임 : 1. 감리단 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 제비율 검증 확인 1부. 끝.