문서번호	원무과-10090
결재일자	2021. 8. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
시설팀장		원무과장		서북병원장
박흥기		김용범		08/13 박찬병
협 조	진료부장				代송은향
	간호부장				함형희
	약제부장				조경숙
	주무관				이호식
	주무관				장보규
	주무관				황필권

서북병원 소방

스프링클러 설치 추진계획

2021. 8

서 북 병 원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

서북병원 소방 스프링클러 설치 추진계획

서북병원 소방 스프링클러 설치를 위한 추진계획을 수립, 시행에 만전을 기하고자 함

□ 추진 배경 및 근거

○ 소방시설법 개정에 따른 스프링클러 미 설치구간 소방 설비 확대

- 소방시설법령제15조6(강화된소방시설기준 적용) 6층이상 모든층(스프링클러설치)

○ 화재예방 및 대응능력 강화를 통한 화재로부터 안전한 병원환경 조성

- 다중이용시설인 의료시설내 화재예방 강화로 환자와 내원객 안전성확보

○ 서북병원 소방 스프링클러 확대 설치계획 수립(’18.09.)

□ 중점 추진방향

○ T/F를 통한 부서 간 사전협조 체제 구축으로 ‘코로나-19 확진자 전담병원 운영에 차질 없도록 조치

- 공사 기간 내 진료, 치료 등 최대한 정상운영을 위한 각 부서 참여 T/F 구성운영

○ 시의 적절한 공사시행을 위한 분야별 세부 발주계획 수립․시행

- 분야별 시의 적절한 공사 발주 및 감리용역 시행을 통한 적기 공사완료

○ 분야별(건축·소방·기계·전기·통신) 협업 강화를 통한 원활한 공사 추진

□ 사업 추진 개요

○ 사업명칭 : 서북병원 소방 스프링클러 설치

○ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2022. 09.

○ 총사업비 : *******************************>

○ 사업규모

- 본관·동관·서관동 1~3층, 6~7층(총13,215㎡)

- 알람펌프· 소방 스프링클러 배관· 감지기설치, 천정 마감 등

○ 그간 추진경위

- `18. 09.  소방 스프링클러 확대설치 보고(병원장 방침)

- `19. 10.  소방 스프링클러 설치 투자심사 완료/ 설계용역 준공

- `20. 11.  소방 스프링클러 설치 1차년도 사업비(30%) 확보

- `21. 06.  소방 스프링클러 설치 설계금액 재산출 용역 완료

- `21. 07.  소방 스프링클러 설치 2차년도 사업비(70%) 편성 요구

- `21. 08.  소방 스프링클러 설치공사 사전 계약심사 중

□ 사업 추진 세부 계획

□  T/F 구성ㆍ운영

○ 운영목적 : 서북병원 소방 스프링클러 설치에 따른 부서별 업무 협의, 협조지원 논의 및 확정

○ Task Force 명칭 : 서북병원 소방 스프링클러 설치 T/F

○ 인적구성

- T/F팀 구성 : 부서별 전문 인력 추천

· 진료부, 간호부, 약제부 각 0명(배정인원은 부서별 실무추진 인력으로 구성하여 추천)

- 당연직 위원 : 병원장, 진료부장, 간호부장, 약제부장, 원무과장

※ 공사 착공 시는 시공사 현장대리인, 감리자, 기계(전기)반장 사안별 참여

○ T/F 회의 운영기간 : ’21.08.~ ’21.8.(공사 완료시까지)

- 공사기간 동안 사안별 필요시 수시 개최

○ T/F 기능 및 업무

- 공사시행 전, 후 과정에서 부서별 협의 사항 등 검토 및 의견 제시

- 공사시 병원 진료, 치료 등 운영에 최대한 지장을 초래 하지 않는 범위에서

시행하되, 불가피 시 그에 따른 대책 방안 등 협의 및 조치

- 기타 공사시행에 따라 발생하는 현안사항 등 지원 협의 조치

□  공사(용역) 시행계획

○ 공 사 명 : 서북병원 스프링클러 설치공사(용역)

- 공사 : 건축, 소방, 기계, 전기, 통신

- 감리 : 소방, 기계, 전기

○ 시행방법 : 장기계속사업(’21. ~ ’22.)

- 각 공정별 발주방법 별도방침 수립

○ 시행기간 : 착공(수)일로부터 ’22.9.까지

○ 소요예산 : 3,661백만 원(’21년 1,018백만 원/’22년 2,643백만 원)

○ 주요 사업내용

공정별	공 사 내 용
건축	· 스프링클러 설치_천정(텍스, 석고보드) 철거 및 재시공 · 알람밸브실 신규 구축
소방	· 스프링클러 설치 · 화재감지기 및 유도등 철거·설치 등
기계	· 스프링클러 설치_사무공간 및 병동(음압병동 포함) 공조 닥트 철거 및 설치 등
전기	· 스프링클러 설치_ 추가 펌프 동력선 신설 · 스프링클러 설치_ 조명 철거 및 재설치
통신	· 스프링클러 설치_CCTV, 방송설비 등 정보통신설비 철거 및 재설치

□ 총 사업비

○ 연차별 사업비 변경

(단위: 천원)

구분	당 초(`19년 설계용역)			변 경(`21년 재 산출)			비 고
	계	시설비	감리비	계	시설비	감리비
*	*********	*********	*	*********	*********	******
****	*********	*********	*	*********	*******	******	시설비 → 감리비 예산변경(예정)
****	*********	*********	*	*********	*********	******

○ 예산과목

- 서북병원 운영, 서북병원 공공의료서비스 수준 관리, 시설비

- 서북병원 운영, 서북병원 공공의료서비스 수준 관리, 감리비

□ 향후 추진계획

○ ’21. 08. 계약심사 및 일상감사 등 행정절차 이행, TF회의(1차)

○ ’21. 09. 예산변경, TF회의(2차), 발주방침, 입찰공고

○ ’21. 10. 공사(용역) 착공(수), TF회의(3차~)

○ ’21. 12. 공사 및 용역 1단계 준공

○ ’22. 01. 공사(용역) 2단계 착공(수), TF회의

○ ’22. 08. 공사 준공

○ ’22. 09. 용역 완수.  끝.