투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재(레미콘) 수량 변경(증) 요청(잠실수중보 보수보강공사)

우리본부에서 시행 중인 잠실수중보 보수보강공사에 소요되는 관급자재(레미콘)에 대하여 아래와 같이 수량 변경(증)을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 수량변경 요청내역

품명	규 격 (G2B식별번호)	단위	당 초			변경			증,감		납품요구번호	납품 기한
			수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	금액
레미콘	레미콘, 흥국산업, 25-21-150 (22601115)	㎥	300	66,150	19,845,000	456	66,150	30,164,400	증)156	증) 10,319,400	12-11-1-40078-00	2021/08/31
	레미콘, 산하인더스트리, 25-21-150 (22601115)	㎥	300	66,150	19,845,000	456	66,150	30,164,400	증)156	증) 10,319,400
소계					39,690,000			60,328,800		증) 20,638,800
수수료	0.54%				214,320			325,770		증) 111,450
합계					39,904,320			60,654,570		증) 20,750,250

○ 변경사유 : 물량변경에 따른 수량 변경

○ 예산과목 : 한강사업본부 치수과, 치수 및 하천 관리, 하천복원 및 정비, 국가하천 유지보수, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 물순환안전국 하천관리과).  끝.

							치수과장
주무관							박지수			치수과장					08/13 최연호
협조자
시행			치수과-5333									(						)		접수											(						)
우	04770					서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)															/
전화								/전송								/													/	대시민공개