투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신	엘에스네오텍(주) 대표
(경유)
제목	2021 북서울미술관 냉각탑배관 설치공사 공사중지 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 미술관과 계약중인‘2021 북서울미술관 냉각탑 제조구매’건과 관련하여, 당초 예정되었던 일정에 물품 반입이 불가능한 상황이므로,

3. 냉각탑 물품구매와 연계공정이 필요한‘2021 북서울미술관 냉각탑 설치공사’는 감독부서의 별도 지시가 있을때까지 공사를 중지하여 주시기 바랍니다.

※ 발부처의 요청으로 인한 공사중지 기간은 향후 계약기간 연장으로 인정됨

끝.

	서울시립미술관장
주무관	김성준		운영과장	08/13 오근
협조자
시행	운영과-5741	(		)	접수		(		)
우	01783	서울특별시 노원구 동일로 1238 (중계동)	/
전화	02-2124-5214	/전송	02-2124-5280	/	sjkim2018@seoul.go.kr	/	대시민공개