코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경(1회)시행 및 준공기한 연기 요청[서울로 7017 엘리베이터 설치 전기공사]

우리시와 계약체결하여 시행중인 『서울로 7017 엘리베이터 설치 전기공사』에 대하여 설계변경(1회) 및 준공기한 연기 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울로 7017 엘리베이터 설치 전기공사

나. 공사기간 : 2021.03.15. ~ 2021.09.10.

다. 도 급 자 : ****************

라. 설계변경(1차)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
****	***********	***********	**********
*****	**********	**********	**********
*****	**********	**********

○ 설계변경사유 : 공사물량 증·감 및 고용개선지원비 등 제경비 변경

마. 준공기한 연기

○ 당 초 : ’21.03.15.~’21.09.10. → 변경  ’21.03.15.~’21.10.29.

○ 귀책사유 : 발주처

○ 연기사유 : 엘리베이터(관급자재)납품기한 연기(’21.10.29)에 따라 전기공사에                      어려움이 있어 공사기간 연기

바. 예산과목 : 교량관리, 고가차도및입체교차로관리, 서울로7017엘리베이터설치공사,  시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 제비율검증 확인서 1부.

5. 준공기한 연기의뢰서 1부.

6. 관급자재 납품연기 요청서 1부.

7. 합의각서 1부. 끝.

	교량안전과장
★주무관	김태형		강북일반교량팀장	민형일		교량안전과장	08/17 代박동욱
협조자	계약총괄팀장	代오선숙
시행	교량안전과-12766	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 서울특별시청 본관 3층(교량안전과)	/
전화	02-2133-1968	/전송	02-2133-1429	/	kimth6908@seoul.go.kr	/	부분공개(5)