문서번호	정수시설과-4794
결재일자	2021. 8. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김영후		유통희	08/17 김훤기
협 조
	주무관			장주혁
	주무관			장현순

폐입상활성탄 준설 및 투입 공사 시행 계획

2021. 8. .

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

폐입상활성탄 준설 및 투입 공사 시행 계획

활성탄흡착지에 기능이 저하된 입상활성탄의 기능 회복을 위해 페입상활성탄을 준설하고 신탄 활성탄으로 교체 시공코자 함

□ 관련근거

○ 입상활성탄 신탄교체 업무계획(생산관리과-12747, ‘20.12.21)

○ 입상활성탄 구매 추진 계획(정수과-10167, ‘20.12.23)

○ 폐입상활성탄 불용처리 및 매각 계획(정수시설과-4183, ‘21.7.7)

□ 추진현황

○ 2021.3.4. : 입상활성탄 구매 계약 완료 [21지]

- 수량 : 7,056㎥(신기화학공업(주)/10,659백만원) - 납품기한 : ‘23.10.

- 신탄 납품일정

구 분		계	‘21.10	‘22.1	‘22.10	‘23.1	‘23.10	비고
납 품 물 량	지수	21	4	4	4	4	5
	㎥	7,056	1,344	1,344	1,344	1,344	1,680

○ 2021.7.26. : 폐입상활성탄 매각 계약 완료 [8지]

- 수량 : 2,688㎥(에쓰씨티(주)외 4 / 15,859천원)  - 매각기한 : ‘22.4.

□ 시행계획

○ 신탄 납품일정을 고려하여 년차별 시행

○ 소형생물 유충 발생시기(4~10월) 및 작업 시기(11월~3월)를        고려하여 장기계속공사로 추진

○ 년차별 시행계획(장기계속공사)

구 분		‘21년		‘22년		‘23년		비고
		1차	2차	1차	2차	1차	2차
지수	21	4	4	4	4	3	2
㎥	7,056	1,344	1,344	1,344	1,344	1,008	672

□ 발주계획

○ 공 사 명 : 2021년 폐입상활성탄 준설 및 투입 공사(장기계속공사)

○ 공사개요  : 활성탄 준설 및 포설 2,688㎡ [8지]

○ 공 사 비

(단위 :천원)

구 분	총 차	1 차	2 차	비 고
도 급 액	391,800	196,300	195,500

○ 공사기간 : 착수일로부터 2022.4.30.까지

○ 계약방법  : 제한경쟁입찰

○ 입찰참가자격 : 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조의           규정에 의한 전문건설업 중 상․하수도설비공사업 등록업체 또는         종합건설업중 토목공사업(토목건축공사업 허용)로서, 주된 영업           소재지가 입찰공고일 전일까지 서울특별시에 소재한 업체

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 재료비(일반재료비)

□ 향후계획

○  2021. 8 : 계약심사요청(본부 안전조사과)

○  2021. 8 : 공사발주(본청 재무과)

붙 임  1. 설계내역서 1부.

2. 시방서(공사설명서) 1부.  끝.