문서번호	정수시설과-2292
결재일자	2021. 8. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
도보선		이종근	08/18 신동호
협 조

『강북통합취수장 감시제어설비 구매설치』설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 08.

『강북통합취수장 감시제어설비 구매설치』

설계변경 검토보고

『강북통합취수장 감시제어설비 구매설치』와 관련한 설계변경     사항에 대하여 보고드림

1		사업개요

□ 계약명 : 강북통합취수장 감시제어설비 구매설치

□ 계약기간 : ‘21.03.22. ~ ’21.09.30.

□ 계약금액 : *************

□ 계약업체 : 중앙아이엔티(주)

□ 공정율 : 98 %

2		보고내용

□ 설계변경

구 분		당초	변경	증감	비고
감시제어설비구매설치	계약금액	*************	*************	************
	계약기간	*********************	*************

□ 주요 변경사항

○ 건강보험, 연금보험, 노인장기보험, 산업안전보건관리비 등

3		보고자 의견

□ 상기 변경사항에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의결과에 따라 설계변경 시행하고자 함

□ 추진일정

○ 심의원회 개최 및 보고 : 2021.08.18.

○ 설계변경 시행 : 2021.08.18.

첨 부 : 설계변경 내역서 1부.  끝.