문서번호	도로계획과-10872
결재일자	2021. 8. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로공간계획팀장	도로계획과장
민동찬	代조중환	08/13 권완택

양재IC 및 주변지역 일대 도로개선방안 수립 용역

설  계  변  경(정 산) 보  고

2021. 8.

안전총괄실

(도로계획과)

양재IC 및 주변지역 일대 도로개선방안 수립 용역

설  계  변  경(정 산) 보  고

□ 개    요

○ 용 역 명 : 양재IC 및 주변지역 일대 도로개선방안 수립 용역

○ 용역내용 : 양재IC 일대 개발사업 등 시행으로 인한 문제점 및 개선대책 검토

○ 계약금액 : 금팔천팔백이십구만구천원(금88,299,000원)

○ 용역기간 : 2020. 10. 20. ~ 2021. 8. 17.

○ 계 약 자 : 에이스톤엔지니어링(주)

□ 보고내용

○ 계약변경 내용(정산)

- (당초) 88,299천원 → (변경) 87,699천원 (감 600천원)

구 분			금 액	증·감
총 용 역 비		당 초	88,299,000원	감600,000원
		변 경	87,699,000원
	공급가액	당 초	79,180,910원	-
		변 경	79,180,910원
	부가가치세	당 초	7,918,090원	-
		변 경	7,918,090원
	자 문 비	당 초	1,200,000원	감600,000원
		변 경	600,000원

○ 계약변경 사유 : 자문비 정산에 따른 감액 조치

붙  임 : 1. 합의각서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.