문서번호	건축부-13059
결재일자	2021. 8. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
김완선		代손남기	08/18 代유현수
협조
	주무관		손남기

『시립마포 실버케어센터 건립공사』물가변동(2차)에 의한 계약금액 조정

외부전문가 자문회의 개최계획 보고

2021. 8.

도시기반시설본부

[건 축 부]

『시립마포 실버케어센터 건립공사』물가변동(2차)에 의한 계약금액 조정

외부전문가 자문회의 개최계획 보고

「시립마포 실버케어센터 건립공사」관련 ‘물가변동(2차)에 의한 계약금액 조정내역’ 적정성 검토를 위한 외부전문가 자문회의를 아래와 같이 개최하고자 함

1		관계규정

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조, 동시행령 제73조

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제13장(공사계약 일반조건) 제7절(계약금액의 조정) 제3호(물가변동으로 인한 계약금액 조정)

2		자문개요

○ 관련근거

- 물가변동으로 인한 계약금액조정(2회) 검토보고 [유탑(마실)제21-1716호, 2021.8.4.]

○ 자문대상

- 공 사 명: 시립마포 실버케어센터 건립공사

- 시 공 사: 혁성공영㈜

- *************************

- *******************************

- *****************************

- *****************************

<단위 : 원>

**** ***	**** **** ***	**** *******	** ******	**** *******	**** *******	*********** *******
**************	*************	*************	*****	***********	*	***********

○ 자문내용: 물가변동(2차)에 의한 계약금액 조정내역의 적정성 자문

(주요 검토내용)

- 조정요건의 적정성

- 조정대상금액 적정여부

- 물가변동 조정율 및 가중치 검토 등

○ 자문방식: 서면자문 (※ 코로나19 관련 서면자문으로 대체)

○ 외부 자문위원

분 야	성 명	소 속	직 위	비 고
****	***	**********	**	*********
****	***	****** ******	**

3		행정사항

○ 자문위원 수당지급

- ****************

∘ **************************

************************************************************************************************************************

- 예산과목: 도시기반시설본부 건축부, 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화, 어르신 요양 인프라 구축, 어르신 복지시설 설치 지원, 시설비및부대비, 시설부대비(예산편성부서 : 복지정책실 어르신복지과)

- 지급방법: 개별 계좌입금

4		향후계획

○ 서면자문 결과에 따른 의견을 반영해서 계약금액 조정추진

붙임  1. 물가변동으로 인한 계약금액 조정(2차) 공문(건설사업관리단) 1부.

2. 자문의견서(양식) 1부.  끝.