문서번호	설비부-11739
결재일자	2021. 8. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박근형		문학준	08/18 김호성
협조

『시립청소년음악창작센터 건립 전기공사』

관급자재(경관조명) 계약방법 변경 검토보고

2021. 8.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』

관급자재(경관조명) 계약방법 변경 검토보고

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사』관급자재(경관조명)의 계약이 재공고 유찰됨에 따라 계약방법 변경을 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 전기공사

❍ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1029-6 외 4필지

❍ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422.07m²(청소년수련시설)

❍ 계약기간 : 2020.06.22. ~ 2022.06.20.

❍ 계약금액 : 1,337,769,420원

❍ 시 공 사 : ㈜엠비에스엔지니어링, ㈜시티전기

❍ 건설사업관리단 : ㈜종합건축사사무소근정, ㈜세움이앤씨건축사사무소

2		물품내용

❍ 물 품 명 : 경관조명 구매

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰(중소기업자, 지역제한)

❍ 설치기간 : 계약일로부터 2022.06.20.까지

❍ 구매비용 : 148,863천원

3		추진경위

❍ '20.05.19. : 공사발주 시행계획(설비부-7106호)

❍ '21.05.07. : 물품구매 사전규격 공개(설비부-6210호)

❍ '21.04.20. : 계약심사 결과 통보(계약심사과-6824호)

❍ '21.05.13. : 관급자재 구매 의뢰(설비부-6533호)

❍ '21.05.27. : 입찰 공고(공고번호********5351-00)

- 입찰결과 : 개찰 1순위 지역제한 부적격으로 유찰됨.

❍ '21.06.21. : 입찰 공고(공고번호********9761-00)

- 입찰결과 : 투찰률 미달로 유찰됨.

❍ '21.07.27. : 입찰 공고(공고번호********2717-00)

- 입찰결과 : 낙찰하한선 미달로 유찰됨.

❍ '21.08.13. : 입찰결과 유찰 통보(재무과-38408호)

4		관련근거

❍ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조(경쟁제품 계약방법)

- 공공기관의 장은 경쟁제품에 대하여는 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다.

❍ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제7조(중소기업자간 경쟁입찰의 예외 등)

- 중소기업자간 경쟁입찰에 참가한 중소기업자 중 적격자가 없는 등의 사유로 유찰됨에 따라 중소기업자간 경쟁입찰 외의 경쟁입찰 방법으로 새로 입찰을 진행하려는 경우

5		검토내용

❍ 계약방법 변경

변경전	변경후
제한경쟁계약(중소기업자,지역제한)	일반경쟁계약

❍ 변경사유

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조(경쟁제품 계약방법)에 의거 제한경쟁계약(중소기업자,지역제한)으로 구매 의뢰하였으나, 낙찰하한선 미달 등 3차례 유찰된 사항으로,

- 제한경쟁입찰 재공고시 유찰 우려와 전기공사 공정상 관급자재업체 협의필요성 등을 고려하여, 중소기업자간 경쟁입찰의 예외 사유로 일반경쟁계약으로 변경코자 함.

6		조치계획

❍ 상기 내용과 같이 관급자재 계약방법을 제한경쟁계약(중소기업자,지역제한)에서 일반경쟁계약으로 변경하여 구매 의뢰 하고자함.

붙임 : 1. 관련 법령 1부.

2. 입찰결과 1부.  끝.