문서번호	공원시설과-5029
결재일자	2021. 8. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
이호연		양돈욱	전결 08/19 김상국
협조

『광나루한강공원 스케이트보드장 조성공사』

설계변경(정산) 계획 보고

2021. 8.

공  원  부

(공원시설과)

『광나루한강공원 스케이트보드장 조성공사』

설계변경(정산) 계획 보고

우리 본부에서 시행중인 『광나루한강공원 스케이트보드장 조성공사』에 대하여 물량 증․감 및 신규공정을 반영한 설계변경을 시행하고자 함.

공사개요

○ 공 사 명 : 광나루한강공원 스케이트보드장 조성공사

○ 위    치 : 광나루 한강공원(풍납동49-2)

○ 공사기간 : 2021. 4. 22. ~ 8. 30.

○ 총공사비 : **********************************************

설계변경 내용

○ 계약금액 변경(총차)

구 분	당 초	변 경	증․감
총 공 사 비	***********	***********	***********
도 급 비	***********	***********	***********
관 급 비	**********	**********	***********

○ 주요 변경내용

- 스케이트보드장 위치 변경에 따른 배수로 시공물량 감소

․ 보드장 설치 위치를 강심측으로 이동함에 따라 PE배수로 시공물량 감소(L=14m → 10m)

- 문화재 참관조사 시험 토공 물량 신규 발생

․ 관련근거 : 백제학연구소-474호(2021.5.17.)

․ 문화재조사에 따른 지반 터파기 및 되메우기 : V=80㎥

- 산재․고용․건강․연금보험료, 고용개선지원금 등 제경비 정산내역 반영 등

- 관급자재(자연석경계석, 레미콘) 구매 단가 변동 반영

- 수량 변경 내역

구분	공종	규격	단위	수 량		증 감	비고
				변경전	변경후
시설물공	PE배수로 설치	400×250	m	14	10	감) 4
문화재조사	시험터파기	BH0.7	㎥	-	80	증) 80

조치의견

○ 위와 같이 현장여건 변동에 의한 물량 증․감 및 신규공정을 반영한 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  설계변경 내역서 1부.  끝.