문서번호	도로보수과-7605
결재일자	2021. 8. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	남부도로사업소장
정철식	한수영	08/19 차창훈

자동염수살포장치 긴급 수리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도로보수과

자동염수살포장치 긴급 수리계획

(제설대책 사전 대비)

2021년/2022년 제설대책 사전대비를 위해 가동중인 자동염수 살포장치의 염수배관누수 및 작동상태 등을 점검하고 아래와 같이 수리하고자 함

Ⅰ		점검개요

□ 점검일자 : 2021. 1. 22.

□ 점 검 자 : 도로보수과1명, 이택산업 2명

□ 점검내용

◯ 점검대상

- 현재 가동중인 자동염수살포장치 10개소

◯ 점검내용

- 염수배관 누수여부 및 부식상태 등

Ⅱ		현황 및 점검결과

□ 운영현황

◯ 총 10개소 운영중임.

총 수량	동작대교 북단	한남대교남단	한남대교북단 (강변북로)	신도림고가차도	동작대교 남단	남산1호터널	반포대교북단
10 개소	2개소(2010년) 1개소(2012년) 1개소(2020년)	1개소 (2013년)	1개소 (2015년)	1개소 (2016년)	1개소 (2017년)	1개소 (2020년)	1개소 (2020년)

□ 점검결과 : 붙임 참조

◯ 한남대교남단 : 배선손상 및 배관누수, 모터펌프 노후 부식.

◯ 신도림고가차도 : 염수 배관 누수

◯ 기타 설치지점 : 정상가동 중

Ⅲ		고장원인 및 대책

◯ 2013년 2월과 2016년 6월에 설치한 구간으로 노후화로 부식등이 급속하게 진행되면서 염수 살수 압이 떨어지고 곳곳에서 누수가 발생되는 등 고장이 빈번하게 발생되고 있음.

◯ 점검을 통해 전면교체 또는 부분교체등 필요부분은 금년중 긴급 정비해 초동 제설작업에 차질이 없도록 하고자 함.

***********************

****************************

************************************************

****************************************

Ⅳ		추진사항 및 향후계획

◯ 2021. 1. 22 : 이상발견(한남대교 남단,신도림고가차도)으로

긴급 점점.

◯ 2021. 5. 10 : 수리예산 재배정 요구

◯ 2021. 8. 03 : 정비비 재배정(도로관리과 → 사업소)

◯ 2021. 8. 23 : 계약 및 착수

◯ 2021. 9. 30 : 정비 완료

붙임 : 1. 정비비 예산 재배정 1부.

2. 자동염수살포장치 점검현황 1부.  끝.