문서번호	건축부-13134
결재일자	2021. 8. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
고가연		유현수	08/19 代유현수
협 조

『시립동대문 실버케어센터 건립공사』

건설폐기물 실정보고서 검토보고

2021.8

도시기반시설본부

[ 건 축 부 ]

『시립동대문 실버케어센터 건립공사』

건설폐기물 실정보고서 검토보고

『시립동대문 실버케어센터 건립공사』관련 실정보고 검토보고가 건설사업관리단으로부터 제출되어 검토보고 드림

***************************************

1		용역개요

용 역 명 : 시립동대문 실버케어센터 건립공사 건설폐기물 처리용역

위    치 : 동대문구 답십리동 553 외1

규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 3,145.78㎡, 신축

************************************.

************************

*******************

2		추 진 경 위

‘19.10.18. : 건설폐기물 처리용역 계약

‘19.10.24. : 건설폐기물 처리용역 착수

‘21.07.28. : 변경계약(용역기간 연장: 30일)

3		실정보고 내용

관련근거

○ 도시기반시설본부-19-14883(2019.12.19.)호 실정보고(매립폐기물 발생 건 관련) 승인통보

○ 도시비간시설본부-21-6845(2021.06.23.)호 실정보고 승인 및 현장안전관리 철저

○ 방재시설부-9800(2021.07.23.)호 시립동대문 실버케어센터 건립공사 조경공사 실정보고 승인 통보

○ ㈜펨코엔지니어링 PC21(동대문 실버케어)-781호(2021.08.18.) 건설폐기물 수량 증가 실정보고에 대한 검토 보고

실정보고 내용

○ 건축폐기물 처리물량 증․감내역

공종	품 명	단위	수량		증 ․ 감	비 고
			당 초	변경후
****	***	***	******	******	****
	*****	***	******	******	****
	*******	***	******	******	****
****	****	***	******	*****	********
	*****	***	********	********	********
	***	***	*****	*****	*******
	*******	***	******	******	*******
	******* *********	***	********	********	********

- 사유 : 현장여건에 따른 폐기물 수량 증감

○ 폐기물처리비 증·감 내역

공종	품 명	금액(단위:원)		증 ․ 감	비 고
		당 초	변경후
****	***	*******	*******	****
	*****	*********	*********	****
	*******	*********	*********	****
	**	*********	*********	****
****	****	*********	*********	***********
	*****	**********	**********	***********
	***	*******	*	*********
	*******	**********	**********	***********
	******* *********	***********	***********	************
	***	**********	**********	***********
	**	***********	***********	************
**		***********	***********	************

- 적용단가 검토 : 기 계약단가 적용(낙찰률: 87.7663%)

○ 폐기물처리 총용역비 증가 현황

구 분	당 초	변경후	증 ․ 감	비고
**********	***********	***********	************
****	***********	***********	************	(단수정리)
*****	**********	**********	***********
****	***********	***********	************

4		감리자 검토의견

****************************************************************************************************

5		처리의견

*********************************************

붙임  실정보고서 검토서(건설사업관리단) 1부.  끝.