투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	「광나루한강공원 스케이트보드장 조성공사」 설계변경(정산) 시행 및 계약의뢰

우리 본부에서 추진 중인 『광나루한강공원 스케이트보드장 조성공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 광나루한강공원 스케이트보드장 조성공사

나. 공사기간 : 2021.4. 22.~ 8.30.

다. 계약금액 : *************

라. 도급업체 : ******************

마. 변경사유 : 신규 공종발생 및 시공물량 증․감, 제경비 정산 등

바. 변경내용

구 분		변 경 전	변 경 후	비고(증감)
총 공 사 비		***********	***********	***********
도급비	공급가액	***********	***********	***********
	부가가치세	**********	**********	***********
	소 계	***********	***********	***********
관 급 자 재 비		**********	**********	***********

바. 예산과목

- 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 직영 체육시설 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙임  1) 설계변경 내역서 1부.

2) 합의각서 1부.

3) 계약금액조정검증 결과 1부.

4) 설계변경 방침서 1부.  끝.

							공원시설과장
주무관							이호연			공원시설과장					08/19 양돈욱
협조자				주무관						조승만					기획예산과장							안인숙
시행			공원시설과-5034									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)