문서번호	급수운영과-12123
결재일자	2021. 8. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
신중선		이승우	08/20 代이승우
협조

작업지시(추가) 보고

(선릉로 장기사용 송배수관 정비공사)

2021. 8.

강남수도사업소

(급수운영과)

작업지시(추가) 보고

「선릉로 장기사용 송배수관 정비공사」시행 중, 아래와 같이 추가 작업지시 사항이 발생하여 공사감독처에 시공 지시하고자 합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 선릉로 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공사기간 : 2021. 6. 23 ~ 2021. 12. 29

○ 공사규모 : D=100~600㎜, L=1,128m

○ 도 급 비 : ********************************

□ 추가 작업지시 사항

○ 사    유

- 역삼동 765-28번지 인입관이 폐쇄대상 관로(SP/Ø600)에서 분기된 것으로 확인되어, 분기점 폐쇄 후 인접 배수관(DP/Ø400)에서 분기(당초 설계 미반영)

○ 공사개요

- D=40mm, L=6.5m 부설 [분기점 폐쇄(Ø40mm) 1개소)]

역삼동 765-28

기존 분기점 폐쇄

D=40mm, L=6.5m

□ 조치의견

○ 위와같이 추가 작업지시 사항에 대하여 시공 및 설계변경 반영하고, 공사관리에 철저를 기하도록 공사감독처(서울시설공단)에 통보하고자 함. 끝.