문서번호	시설과-4058
결재일자	2021. 8. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
권정수	代김현태	박종수	08/20 박미애
협 조
	서울숲공원지원과장		송복식

서울숲 CCTV 3단계 정비사업 시행 계획

2021. 8.

동부공원녹지사업소

(시설과)

서울숲 CCTV 3단계 정비사업 시행 계획

서울숲공원 내 보안 취약지역에 CCTV를 신설하여, 공원 내 안전사고 및 범죄예방을 강화하여, 보다 안전하고 편안한 공원환경을 조성하고자 함

Ⅰ		관련근거

❍ ************************************

***************************************

*****************************************

***************************************

*************************************

Ⅱ		사업개요

❍ 사 업 명 : 서울숲 CCTV 3단계 정비사업

❍ 위    치 : 서울숲공원(성동구 뚝섬로 273)

❍ 사업대상 : CCTV 시스템 및 관련 통신설비

화소별	*	***** **	****** **	****** **	비고
****	**	**	**	**

**************************************

❍ 사업기간 : *******************

❍ 사업내용 : ***************

***********************

***************************

****************************************

❍ 설계/감독 방법

*******************

********************

❍ 사 업 비 : ***********************

❍ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 응봉공원 시설물정비, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

Ⅲ		시행계획

용역 시행방법

****************************************

**************************

*********************

*******************************

*************

- *******************************************

- ****************************

공사 시행 방법

*******************************

*************************************

***********************************

*********************************************

************************************

Ⅳ		행정 사항

추진 일정

❍ 2021.8.        : 사업추진계획 수립, 기술용역타당성심사, 설계용역 발주

❍ 2021.9.~12.   : 용역 계약 및 시행

❍ 2021.12.~2022.2. : 공사발주 전 사전 행정절차 이행

- 정보화사업 보안성 검토, 행정예고(CCTV 설치) 등

❍ 2022.2.        : 공사 발주 및 계약

❍ 2022.3.~6.    : 공사 시행 및 준공

(※동절기 굴착통제기간 : ‘21.12. ~ ‘22.2.)

특기 및 협조사항

❍ 서울숲 CCTV 2단계 정비사업 완료시점(‘21년 9월초)에 맞춰, 3단계 정비사업 설계용역 시행토록 추진

- 3단계 설계용역 시행 시, 2단계 정비사업 준공 자료(도면 등) 필요함

❍ CCTV 신규설치 장소는 서울숲 관리부서(서울숲공원지원과, 서울숲컨서번시)에서 협의·선정하여, 설계용역 시 반영.  끝.