문서번호	시설보수과-2951
결재일자	2021. 8. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
강연홍		전결 08/20 류태용
협조

- 여의2교 보수공사

설계변경(정산) 보고

2021. 08.

강서도로사업소

[시설보수과]

여의2교 보수공사

설계변경(정산) 보고

「여의2교 보수공사」와 관련, 기 보고한 공사물량 증·감 및 각종보험료 미사용 등에 따른 최종 정산 처리된 설계변경내역이 감독기관인 서울시설공단으로부터 제출되어 검토보고 후 조치코자 함.

※ 시설공단 공사감독1처-6271호(2021. 08. 18) : 설계변경(정산) 보고서 제출

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 여의2교 보수공사

○ 공사기간 : 2021. 3. 30 ~ 2021. 9. 25

○ 공사규모 : 교면포장 42.7@, 표면보수 924.3㎡, 상판보수 77.4㎡ 등

○ 도 급 비 : 642,115,000원

○ 도 급 자 : 태화건설(주) 대표 유순종

○ 감 독 자 : 서울시설공단(공사감독1처) 이선우

○ 예산현황 : 총공사비 862,000천원

	< 예산현황 >
▷공사발주: 862,000천원(도급비 733,000. 관급비 97,000. 이전비 32,000) ▷계약금액: 746,207천원(도급비 642,115. 관급비 77,730. 이전비 26,362) ▷낙찰차액: 115,793천원

○ 현재공정 : 100%

Ⅱ		설계변경(정산) 검토보고

❏ 서울시설공단 보고사항

1. 보고내용 : 현장실정보고 등에 따른 신규공종 발생 및 물량 증․감, 제경비 실정산 반영에 따른 설계변경

2. 주요내용

1) 공사현장 실정보고에 따른 물량증감 반영 및 신규공종 발생

① 교면방수, 아스콘포장, 콘크리트 표면보수 등 실측수량 반영

‣ 주요내용 : 현장실정에 맞도록 공사완료후 실측물량 내역 반영

② 신규공종에 대한 실측물량 내역 반영

‣ 주요내용 : 교량하부 작업발판 변경, 공사홍보물 추가설치, 현장사무실 임대, 미세분진 비산방지장비 운용 등

※ 관련근거 : 시설보수과-2114호(‘21.6.15), 공사감독1처-3231(‘21.5.14), 시설보수과-1740호(’21.5.14). 공사감독1처-4494(‘21.6.17), 시설보수과-2201호(’21.6.23)

2) 실제 시공물량에 따른 제경비 등 정산결과 반영

‣ 주요내용 : 설계변경 시행시 제경비(각종 보험료 등) 정산내용 반영

▣ 주요 물량 증감내역

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증․감
교량상판보수	레코MMA, 야간 T=30mm	㎡	77.4	300.6	증) 223.2
공간작업대 설치 및 해체	주간	㎡	1,007	0	감) 1,007
고소작업차	주.야 3톤	일	0	50	증) 50
콘크리트 표면보수	벽체, 주간	㎡	74.9	175.0	증) 100.1
	천정, 주간	㎡	849.4	814.7	감) 34.7
	벽체, 야간	㎡	0	36.5	증) 36.5
	천정, 야간	㎡	0	172.2	증) 172.2

○ 공사비 변경 내역(정산)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비고
총 공사비	746,207,700	775,170,000	증) 28,962,300
도 급 비	642,115,000	673,277,000	증) 31,162,000
관 급 비	77,730,400	78,698,400	증) 968,000
이 전 비	26,362,300	23,194,600	감) 3,167,700

※ 예산과목 : 교량안전과, 일반교량관리, 여의2교보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

※ 증가 예산은 공사낙찰차액 사용(방침) : 시설보수과-2043호(‘21.6.10)

시설보수과-2111호(‘21.6.15)

Ⅲ		검토의견 및 조치계획

○ 공사진행중에 현장 실정보고된 사항에 대하여 기 승인 처리한 내용이 반영되었으며, 계약자가 제출한 제경비(보험료 등)에 대하여  실정산 반영

○ 상기와 같은 변경물량 등에 의거 설계변경 되었음을 확인하였기 설계변경(정산) 승인코자 함

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 관련공문 및 설계변경(정산) 설계도서 1부.

3. 검증확인서 2부.  끝.