문서번호	물재생시설과-9174
결재일자	2021. 8. 23.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	물재생기획팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
양해선	조장환	윤창진		08/23 한유석
협 조

「물재생체험관 ․ 상부공원 조성」

추진현황 보고회 개최결과 보고

2021. 8

2020. 6

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「물재생체험관 ․ 상부공원 조성」

추진현황 보고회 개최결과 보고

서남물재생센터 시설현대화 사업의 일환으로 시행 중인 물재생체험관 및 상부공원 추진현황 보고회 결과를 보고 드림.

□ 사업개요

○ 물재생체험관·상부공원 조성

- 체 험 관 : 건축연면적 3,443㎡(3층), 전시연면적 2,329㎡

- 상부공원 : 52,900㎡(잔디광장 10,544㎡, 물놀이장 1개소, 생태연못 1개소)

○ 사 업 비 : 14,939백만원

- 체험관 전시공사 : 5,980백만원

- 상부공원 조경공사 : 8,959백만원

○ 사업기간 : ’09.11. ~ ’21. 10.

□ 그간의 추진사항

○ ’19. 4. 9. : 서남물재생센터 홍보관 건립 추진계획 수립

- 홍보관 전시안 특성화 TF팀 구성 추진

○ ’19. 8. 1. : 민간전문가 위촉 및 TF회의 개최

*****************************************************

○ ’19. 9. 9. : 실무TF 2차회의 개최

○ ’19.10.18. : 상부공원 서울식물원 연계조성 검토회의

○ ’19.10.30. : 실무TF 3차회의

○ ’19.11. 7 : 외부전문가 자문회의 개최

- 홍보관 1층은 전문가 집단, 2층은 어린이 중심공간으로 구분 연출

- 최근 변화된 여건을 고려한 체험놀이시설과 복합 휴게시설 형태의 특화공간 구성

○ ’20. 2.13. : 실무TF 4차회의

○ ’20. 3.12. : 홍보관 명칭공모 선정(“서울물재생체험관”)

○ ’20. 6.25/26 : 체험관·상부공원 기본계획 검토(안) 제출(건축부/방재시설부 → 시)

○ ’21. 6.30. : 실무TF 5차회의

□ 보고회 개요

○ 일   시 : ’21. 8. 9.(월), 10:00~

○ 장   소 : 물순환안전국 8층 회의실

○ 참 석 자

- 서울시 : 물순환안전국장, 물재생시설과장, 국 홍보담당

- 도시기반시설본부 : 김송희 주무관(건축부), 김희숙 주무관(방재시설부)

- 유관기관 : 이민형 계장(물재생시설공단), 이윤재 학예사(중랑물재생센터)

***********************

*****************************************

*************************************

○ 안   건

- 물재생체험관 전시공사 및 상부공원 조성 추진현황

- 전시공사 추가공정 검토 및 상부공원 명칭 선정

‣ 미끄럼틀 마감재 변경, 체험관 휴게의자 배치, 도서책 구비, 사무실 집기류, 홍보물 및 홍보기념품 제작, 물재생체험관 사인, BI 제작 등

‣ 상부공간 네이밍 선정

□ 회의결과 주요내용

【물재생체험관 관련】

○ 10월 개관을 위해서는 실공사시 현장 상황과 달라지는 부분에 대해 적극적인 변경 승인 결정 필요********

○ 설계변경 필요시 일정 규모 이상은 변경 심의를 거쳐야 하므로 행정절차 이행 기간 필요******************

○ 1층 체험관의 매핑 영상존은 개방적이라 매핑 효과가 적을 것으로 보이므로 검토 필요********

○ 로비 입구 신규 포토존 계획은 많은 사람이 모이는 장소이므로 공간 확보가 필요함*****************

○ 봉사자 운영공간, 로비, 각종 홍보물 보관 장소, 유모차, 휠체어 보관 장소 등 공간 확보 필요*********

○ 체험관 내 휴게의자 추가 배치보다는 휴게 공간 이용을 권장하여 어린이와 보호자가 함께 체험함이 바람직함********

○ 미끄럼틀 마감재의 변경(PVC → SUS)은 적정함(*******

○ 물놀이 체험공간 옆 도서관의 도서는 체험 후 젖은 손으로 책을 만질 수 있으므로 운영 방안 마련 필요********

○ 체험관․상부공원의 운영자가 참여한 상태에서 공사가 진행되었으면 함********

○ 운영 인력은 ’22.1월 채용 예정이며, 채용전 까지는 단기간 시간제  근로자를 활용 예정임********

○ 영상, 전시 텍스트 용어는 일반적 용어를 쓰지 말고 어린이 등 타깃층이 이용할 수 있는 용어로 설명******************

○ 개관 후 코로나-19 등 비대면 상황에서의 체험관 운영방안 마련 필요*********

【상부공원 관련】

○ 상부공원 네이밍은 ‘물재생원’ 추천함********

○ 하수처리시설을 공원으로 오인하여 안전사고 발생 우려가 있으므로 시설내 안내표지 보강 필요*******************

○ 물놀이장 등 항시 감시체계 구축이 필요한 곳은 CCTV, 방송설비 시스템 등 구축 필요*********

○ 어린이 놀이터는 관련 법에 의한 심의 등 사전 절차가 필요한지  검토 시행 필요*********

○ 어린이 물놀이터 등은 안전관리 규정 준수, 인력 배치 등 시민안전에 대해 특별히 신경써주기 바람*********

○ 빗물 재이용 등 물순환 회복을 위해 우수유출이 저감되도록 시설보완이 가능한 부분은 보완******************

□ 회의결과 조치계획

○ 시설상부에 잔디, 수목 식재를 통해 빗물의 직접유출이 최대한 저감시키고, 도로․주차장 등 포장시 투수포장 최대한 시행

- 하수처리시설을 지하화한 상부공간(평균 1.2m 성토)의 특성상 빗물분담량 의무 적용에는 한계가 있으므로 빗물의 직접유출이 최소화 되도록 조치

○ 상부공원 명칭은 시 직원 대상으로 네이밍 현상 공모 시행 확정

- ‘서남물재생공원’, ‘물재생원’, ‘물재생 동산’, ‘물빛소리원’ 등 물재생체험관과 상부공간의 특화된 이미지와 융화되는 적정한 명칭 선정

○ 시설 개관과 연계한 추가 업무 시행부서 지정 등 보고회에서  논의된 사항 사업부서에 조치토록 통보

- 물재생시설과 : 상부공원 명칭 선정을 위해 네이밍 공모

-  물재생시설공단 : 물재생체험관 사인, BI 제작, 상부공원 네이밍 제출

- 건축부 : 미끄럼틀 마감재 재질 변경 시행(기존 PVC → 변경 SUS)

- 방재시설부 : 도서 책 구비, 사무실 집기류, 홍보물 및 홍보기념품 제작

※ 로비 입구 신규 포토존 설치 및 휴게의자 추가배치는 사업에서 제외

************************************

******************************

□ 향후계획

○ 회의결과 및 추가업무 시행부서 지정사항 관계부서 통보(’21. 8.)

○ 물재생체험관 및 상부공원 공사 완료(’21.10.)

***********************************

붙임 : 1. 물재생체험관 전시공사 추진현황 1부.

2. 상부공원 추진현황 1부.

3. 검토의견서 각 1부.  끝.