문서번호	녹색에너지과-19516
결재일자	2021. 8. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	스마트에너지팀장		녹색에너지과장		환경에너지기획관		기후환경본부장
박우현	이재복		문인기		이인근		08/23 유연식
협 조
	주무관					고기탁

- 태양광 신기술 실증단지 조성 및 운영 -

사업계획 변경 검토보고

2021. 8

기후환경본부

(녹색에너지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 태양광 신기술 실증단지 조성 및 운영 -

사업계획 변경 검토보고

「태양광 신기술 실증단지 조성 및 운영 」대행협약을 체결한 서울기술연구원으로부터 市 대행(위․수탁) 사업기간 연장 등 사업계획 변경 요청이 있어 이를 검토하고 조치계획을 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 서울기술연구원 실증연구팀-601(21.8.13), 부속합의 계약기간 연장요청

Ⅱ		사 업 개 요

○ 사 업 명 : 태양광 신기술 실증단지 조성 및 운영

○ 위    치 : 양천구 목동서로 20(서울에너지공사 건물 일대)

○ 사 업 비 : 46억원[서울기술연구원 9억, 서울에너지공사 37억(시범사업비 10억 포함)]

○ 참여기업 : 16개 기업(2개 컨소시엄), 15개 기술 ※ 기술공모로 선정(서울기술연구원)

○ 사업내용 : 참여기업 현장설치 등 지원 및 모니터링 분석시스템 구축 등

○ 사업기간 : ’20.7.14. ~ ’21.12.31.

Ⅲ		추 진 경 위

○ ’20.6.   : 태양광 신기술 실증단지 조성 및 운영계획 수립(본부장 방침)

○ ’20.7.   : 서울시↔서울기술연구원, 서울에너지공사 간 대행계약 체결

○ ’20.7.   : 참여기술 공고‧접수 및 기술심사 평가(15개 기술 선정)

○ ’21.3.   : 서울시↔서울기술연구원, 서울에너지공사 간 부속합의 체결

○ ’21.8.   : 부속합의 사업기간 연장 등 변경 승인요청(서울기술연구원 → 서울시)

Ⅳ		사업계획 변경

******************************

*********

***********************************************************************

*********************************************************

*********

*****************************************************

*********************************************************************

*************************************************

*********

*****************************************************

*********

************************************

***********************************************

***************************************

*************************************

*********

**************************************************************************************************************

*********

************************************************************************

**************

****	**	******		***	**
		****	****
*****	**************	******	******	******
*****	****	*	*****	******	**

Ⅴ		향 후 계 획

○ ’21.8.24.      : 사업변경계획 승인 통보(市 → 서울시에너지공사)

○ ’21.11~12월  : 서울시↔서울에너지공사 간 추가 부속합의 체결(운영예산 2억원)

○ ’22.7월까지    : 성능검증 완료 및 성능확인서 발급(서울기술연구원)

○ ’22.8월 ~     : 우수기술 시범사업 추진

붙임 : 1. 대행계약서 및 부속합의서(서울기술연구원) 각 1부.

2. 대행계약서 및 부속합의서(서울에너지공사) 각 1부.  끝.