투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계심의 등 심의에 필요한 자료 제출 협조

1. 귀사에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 사업소의『상도터널 제연설비 실시설계 용역』과 관련“서울시 건설기술심의”를      진행하고 있으나, 귀사의 설계서가 늦게 제출되고 있습니다

3. 이로인한 심의 기간 지연으로 준공기한이 연장되는 사례가 없기를 바라며, 향후 준공      기한의 연장은 귀사의 책임을 알려드립니다. 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
수신자	유원컨설턴트(주),(주)동해종합기술공사,상진기술엔지니어링(주)
주무관	이정호		기전과장	08/23 석대창
협조자	주무관	이건용
시행	기전과-7050	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3284-5436	/전송	02-841-6458	/	alrai@seoul.go.kr	/	대시민공개