문서번호	시설관리과-14283
결재일자	2021. 8. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설안전팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
김주경	이규희	08/23 김명용
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

길동배수지(1,2지) 내부 방식공사 준공기한 연기 검토 보고

2021. 8. 23.

강동수도사업소

(시설관리과)

길동배수지(1,2지) 내부 방식공사 -

준공기한 연기 검토 보고

길동배수지(1,2지) 내부 방식공사와 관련하여 서울시설공단으로부터 준공기한 연기 검토보고서가 접수되어, 검토한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

공사현황

○ 공 사 명 : 길동배수지(1,2지) 내부 방식공사

○ 공사기간 : **************************

○ 계약금액 : **************

○ 공사개요 : *********************************

○ 계약업체 : *************

※ 관련문서 : 공사감독2처-10151(2021. 8. 23.)호「준공기한 연기 검토보고서 제출」

공사 추진내용 및 잔여 공정

○ 현재 공정률: *********************

○ 작업 완료내용

- 1지 작업 완료

- 2지 그라인딩 작업중(94% 완료)

○ 잔여 작업내용

- 그라인딩 잔여(6%) 작업

- 콘크리트 단면보수 및 폼타이제거(그라인딩 완료 후 확인)

- 도막식 방수방식 작업(6,699㎡)

- 패널식 방수방식 작업(2,175㎡)

- 공사 마무리 정리, 항청소, 설계변경, 준공검사

계약업체 준공기한 연기 요청내용 및 공단 검토의견

【계약업체 연기 요청기간: ****】

○ 공원점용허가 지연으로 인한 착공지연 …………………………… 12일

○ 작업구의 토피가 깊어 가설흙막이 설치에 따른 공사기간 지연… 24일

○ 발주청의 작업지시(1~4차)에 따른 공사기간 지연 ………………  52일

○ 발주청에서 1지 공사완료 후 담수 및 통수에 소요되는 기간이

늦어져 2지의 착공시기가 지연 ……………………………………… 31일

【공단 검토의견: ****】

○ 도급자가 제출한 상기 항목의 소요일수는 적정한 것으로 판단됨

○ 위 사항으로 당초 준공일인 2021년 9월 1일 내 전공종 완료 및 준공이 불가한 실정이므로 공사 지연일수인 119일 내에서 준공기한을 연기하여 잔여 공종 완료 및 준공처리에 만전을 기함이 타당함

사업소 검토의견 → *******

○ 공원점용허가(강동구 푸른도시과)가 15일 이내 이나, 27일 경과 후 허가되어 착공이 12일 지연된 사실이 있음

○ 작업구 설치가 설계도서와 상이(터파기 토피가 1m가 아니고 2.5m임)하여

가설흙막이를 설치함에 따라 공사기간이 24일 지연된 사항 타당함

○ 발주청에서 당초 설계에 미반영되어 추가 작업(①각 지별 유입관에 거름망 설치 ②환기구 설치 ③방충시설 설치 ④관랑실 정비)으로 인한

공사기간이 52일 지연된 사항 타당함

○ 1지 공사완료 후 담수 및 통수에 소요되는 기간을 10일로 산출 하였

으나, 실제 41일 소요되어 2지 착공이 31일 지연된 사항 타당함

※ 당초 준공기한을 2021.9.1.에서 119일 연장한 2021.12.29.로 연기     하는 것이 적정하다고 판단됨.

조치계획

○ 상기와 같은 사항으로 공사기간 연기가 불가피한 실정이기에 아래와

같이 준공기한을 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

▶ 당초 : 2020. 7. 14. ~ 2021. 9. 1.

▶ 변경 : 2020. 7. 14. ~ 2021. 12. 29.(총 119일 연기)

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

준공기한 연기에 따른 귀책사유가 우리 사업소에 있는 바, 지체상금

미부과

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고 관련서류 각 1부.
2. 계약업체 연기요청 관련서류 1부.  끝.