문서번호	물재생계획과-11255
결재일자	2021. 8. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	하수정비팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
김재윤	이웅희	이임섭		08/24 한유석
협 조
	하수계획팀장		노승원
	하수설계정보팀장		강철규
	주무관		이승주

2022년 소구역 하수관로 정비 추진계획

2021.  8.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□	2030 하수도정비 기본계획 반영
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 소구역 하수관로 정비 추진계획

‘22년 소구역 하수관로 정비사업에 대한 추진계획을 수립하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

1		추진근거

○「2030 하수도정비 기본계획(환경부 승인 ‘18.1)」

- 배수분구 단위 정비를 배출 토구 중심의 소구역 단위로 정비 개편

○ 배수분구 하수관로 종합정비사업 추진계획(‘19.3)

- 진행 중 사업 ‘22년까지 마무리/토구별 소구역 정비사업 추진

2		그간의 추진사항

○ ‘17.  9.   : 군자-2 소블럭 하수도정비 시범사업 기본계획 용역 시행계획

- 군자-2 소블럭 하수도정비 기본계획 용역 : ‘17. 12.~’20. 5.

○ ‘19.  4.   : 토구별 소구역 정비사업 추진계획 수립(장위-1,중곡-1,면목3-5)

○ ‘19. 10.   : 시범사업(3개) 기본 및 실시설계용역 시행

○ ‘20. 12.   : 군자-2 소구역 기본 및 실시설계용역 시행

○ ‘21.  3.   : 소구역 정비 설계용역 자치구 확대 시행(8개 소구역)

※ ‘21년 소구역 하수관로 정비 설계용역 현황(자치구 시행)

연번	소구역명	정비규모 (㎞)	용역현황			비고
			용역비(백만원)	기 간	도급자(대표사)
1	****	***	***	************	********	***
2	****	****	*****	***********	********	****
3	******	***	***	***********	********	****
4	****	***	*****	************	*******	***
5	*****	***	***	************	***	***
6	****	***	***	************	********	****
7	****	***	***	************	********	***
8	****	***	*****	************	***	***

3		‘22년도 소구역 정비사업 추진계획

□ 소구역 하수관로 정비 설계용역

○ 선정 기준 및 사유

****	*	******************	*****	**
****	**	*	*
****	*	************************ ********************	************** *********************

○ 대    상 : ***************                  (단위:백만원)

연번	소구역명	정비규모 (㎞)	공 사 비	설계용역비	선정사유	비고
*****		*****	*******	******
*	*****	***	******	***	**************** *******	***
*	****	****	******	*****	*	***
*	*****	****	******	*****	*	***
*	*****	****	******	*****	*	***
*	****	****	******	*****	*	***
*	****	***	******	***	*	***
*	*****	****	******	*****	**************	***
*	*****	***	******	***	*	***
*	****	***	*****	***	*	****
**	******	***	******	***	*	***
**	****	***	******	*****	*	***

○ 기    간 : ********************************)

○ 설 계 비 : ********* - ****************************** ○ ***************** ******************************** **************************** ****************************

□ 소구역 하수관로 정비공사

○ 대    상 : *****************

********************************************

○ 규모/사업비 : ********************

연번	소구역명	총 괄		‘22년		비 고
		규모(㎞)	사업비(백만원)	규모(㎞)	사업비(백만원)
*****		****	*******	***	******
*	*****	****	******	***	*****	***
*	****	****	******	***	*****	***
*	****	***	*****	***	*****	***
*	****	****	******	***	*****	***

○ 추진계획 - ‘22. 1월 ~ 2월 : 계약심사 등 사전절차 추진 - ‘22. 3월 : 공사 발주 - ‘22. 4월 ~ 12월 : 공사 시행(1차) - ‘22. ~ ’24. : 연차별 공사 시행	장위-4 면목3-5 중곡-1 중랑물재생센터 중랑천 군자-2

4		행정사항 및 향후계획

○ 설계용역 자치구 시행에 따른 용역 관리체계 강화

- 기본방향 : 市에서 자치구 합동자문 실시 등 단계별 검토(자치구 자체 자문 별도)

- 자문단계 : 기본설계, 실시설계 완료 후

- 자문내용 : 사업범위, 설계지표(과업내용) 적정성 및 성과품 전반사항

○ ‘23년부터 본격적으로 정비 할 수 있도록 연차별 설계용역 추진(매년 10~15개)

○ ‘21. 12.    : 2022년 예산 확정

○ ‘22.  3. ~ : 설계용역 및 공사 발주

붙  임  : 1. ‘22년 소구역 정비사업 위치도 1부.

2. 기술용역 추진절차 1부.  끝.