문서번호	시설관리과-20330
결재일자	2021. 8. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이혜진		김대용	08/24 송병욱
협조

『공릉6중블록 무단수 급수체계 구축공사』

잔토처리장 변경(수도권매립지 → 일반 사토장) 검토 보고

2021. 8.

시설관리과

『공릉6중블록 무단수 급수체계 구축공사』

잔토처리장 변경(수도권매립지 → 일반 사토장) 검토 보고

「공릉6중블록 무단수 급수체계 구축공사」의 현장내 발생토(잔토)가   수도권매립지로 반입 불가됨에 따라 잔토처리장 변경에 대한 조치     계획을 보고드림

※ 관련근거: 토사 반입불가 회신[수도권매립지관리공사 매립부-1018호(2021.4.28.)]

현장실정보고 검토보고서 제출[서울시설공단 공사감독2처-9455호(2021.8.10.)]

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명: 공릉6중블록 무단수 급수체계 구축공사

○ 계약금액: *************

○ 계약기간: ***************************

○ 공사규모: ********************

○ 도 급 자: **************

Ⅱ		보 고 내 용

□ 서울시설공단 검토내용

*********************

- 당초 3㎞이내 중간집하장으로 선정되어 있으나 관내 3㎞ 이내에 적정한 부지 선정이 어려워 위치변경************************

*******************

*

- 서울시설공단 검토의견

**************************************************

********************

- 수도권매립지관리공사 관급토사장 현장여건(정비 등)으로 인해 수도권 매립지에서 반입불가로 회신됨.

※ 매립부-1018호(2021. 4. 28.),「토사 반입불가 회신」

- 사토장 변경 위치

********************************

******************************************

*

- 신규사토장 운반속도 산출(운반거리 산출 세부적용사항 첨부)

*

- 사토장 변경에 따른 신규 운반단가 적용

***************************************************

구분	공 종	규 격	단위	계약 단가 (원)	신규단가 적용단가 (원)
***	****** ***********	**************************	*	******	********
***		**************************	*	******

- 서울시설공단 검토의견

▸ 사토장 변경의 적정성***************

변경 사토장의 현장 확인결과 사토장으로 사용가능한 부지면적을 확보하고 있으며, 토사반입동의서, 운반거리, 진입로 등이 사토장으로 사용하기에 적정함.

*****************

Ⅲ		조 치 계 획

****************************

********************************************************************************************

**********************************************

*****************************************************************************************************

*************************************************************

붙임  사토장 변경 공사실정 검토보고서.  끝.