공사현장 실정 보고서 제출에 따른 검토보고

(중간집하장 및 사토장 변경)

주무관	시설운영팀장	시설관리과장		결재
장원석	김용만	08/24 이준호
협 조

문서번호 :	시설관리과-14755

『응암동 753번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사』시행중 서울시설공단으로부터 공사현장 실정 보고서가 제출되어 아래와 같이 검토보고합니다.

2021. 08. 24.

보고자 : 지방시설주사보  성명 : 장원석

▢ 공 사 명 : 응암동 753번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사

▢ 공사기간 : 2020. 05. 10. ~ 2021. 01. 01.

▢ 계약금액 : **************

▢ 공사개요 : D = 80~300mm, L = 1,554m

▢ 시 공 사 : **************

▢ 관련공문 : 서울시설공단 공사감독2처-9866(2021.8.18.)호

▢ 실정보고내용 및 사업소의견

검토 공종	현황 및 문제점	공단 검토의견	사업소 의견
중간 집하장 변경	당초 설계 중간집하장 위치는 공사현장 반경 3km로 설계되어 있으나, 현장 주변 3km이내 적합한 중간집하장 부지를 확보할 수 없어 변경이 필요한 실정임 신규 집하장 : 당초 3km → 8.2km(증 5.2km) (경기도 양주시 장흥면 삼하리 349-1)	신규 중간집하장 확인결과 토사, 폐기물 반입 및 자재적치 등 부지면적을 확보하고 있고, 진·출입로 상태 등 중간집하장 사용 적정 시공물량 설계변경 반영시 타당할 것으로 판단되며, 변경된 중간집하장까지의 신규공종 단가산출은 적정하다고 판단됨 개략공사비 : 증)15,437천원	- 거리 산출(8.2km)는 적정 - 단가 적용에 있어 현장~집하장 간 운반속도를 일괄적용한 사항 (적재, 공차) 및 현장-구파발사거리 구간은 서울시 가로별 속도조사표를 참고하여 운반경로 상 단가를 재산출하여 적용토록 하고, 정부 입찰·계약집행기준[기획재정부계약예규 제533호] 제74조2항1호에 의거하여 공단의견에 따라 추후 운반거리 변경에 따른 설계변경 시행 (근거 별첨)

사토장 변경	본 공사의 잔토처리는 수도권매립지(37.77km)로 설계되어 있으나, 수도권매립지관리공사로부터 토사반입 불가 통보(매립부-2012)로 인하여 잔토처리가 가능한 사토장으로 변경이 필요한 실정임 신규 사토장 : 당초 37.77km → 52.1km (경기도 포천시 군내면 용정리 60-2)	신규 사토장 확인결과 사토장으로 사용 가능한 부지 면적을 확보하고 있으며, 개발행위 허가증, 진출입로, 반입 동의서 등 검토결과 사토장으로 적정 사토장 변경에 따른 단가(15,736원/㎡ → 22,580원/㎡) 증가되지만 시공사 협의결과 당초 계약단가와 동일적용	발생토에 대한 잔토처리가 수도권매립지로 설계되었으나, 수도권매립지관리공사로부터 부적합 회신 (매립부 –2012, ‘21.08.02)을 받은 바, 원활한 공사시행을 위해 공단에서 검토한 바와 같이 사토장 (포천시 군내면 용정리 60-2)사용이 적정하며, 공단의견에 따른 기존 계약단가를 적용하여 공사비 변동 없이 시행코자 함 사토장 개발행위허가 기간 갱신문서를 8/30까지 제출할 것

▢ 조치의견

□ 상기와 같이 우리 사업소 의견을 서울시설공단에 통보하고자 하며 추후 설계변경 시 명확한 증빙자료에 의거 정산 반영토록 조치코자 함.

붙임 1. 현장 실정 검토보고(중간집하장 및 사토장 변경) 1부.

2. 중간집하장 및 사토장 변경 실정보고서 및 단가산출서 각 1부.  끝.