문서번호	설비부-12173
결재일자	2021. 8. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정인석		문학준	08/25 김호성
협조

『시립청소년 음악창작센터 건립 설비공사(기계,소방)』

설계변경(1차) 검토 보고

2021. 8.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 설비공사(기계,소방)』

설계변경(1차) 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년 음악창작센터 건립 설비공사(기계,소방)』와 관련 건설사업관리기술단으로부터 제출된 설계변경 사항에 대하여 검토 보고 드림

Ⅰ		공사개요

○ ************************************

○ ***********************************

○ ******************************************

○ ************************

○ **********************************

○ **********************************

Ⅱ		관련근거

○ 기계설비공사, 소방공사 1차 설계변경(계약내역조정) 요청

[시립CM 제2021-266호, 267호 (2021.08.24.)]

Ⅲ		검토내용

○ 계약현황

계약건명	계약번호	계약자	차수	계약기간	계약금액
******	**************	***********	**	***********************	************
			**	***********************	***********
****	**************	********	**	***********************	************
			**	***********************	***********

○ 변경사유 : 선행공정(건축공정, 47.3%)이 4층 골조공사 진행중임에 따라, 전체공정현황을 고려하여 시공 가능한 물량을 1차분과 총차분에서 내역 조정

○ 변경내용

- 기계설비공사

․ 지하1층 횡주관 배관 및 강관 슬리브를 1차분에 반영하고, 공정상 시공이 불가한 옥외인입배관 및 기계실 배관을 총차분에 반영

- 소방공사

․ 합성수지제 가요전선관을 1차분에 추가 반영하고, 공정상 시공이 불가한 풀박스를 총차분에 반영

○ 변경금액

공사명	구분	**	**	*********	비고
기계설비공사	총차	************	************	*	**** ******
	1차	***********	***********	*
소방공사	총차	************	************	*	**** ******
	1차	***********	***********	*

○ 계약기간 : 변경없음

○ 건설사업관리인 검토의견

- 공정현황을 고려하여 시공가능 여부에 따라 1차분과 총차 내역물량을 조정하여 전체 공사비 증감없이 내역만 조정하는 것이 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리기술인의 설계변경 검토의견이 적정하다고 판단되어 설비공사(기계,소방) 건에 대하여 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 공문 각 1부.  끝.