투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	노면표시 2차 작업 연기 시행 및 통보(도로굴착복구노면표시설치공사)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도로보수과-6915(2021. 7.21)호와 관련입니다.

3. 도로굴착복구공사 관련 노면표시 2차 작업이 시행중이나, 유관기관에서 공사 지연에따른 굴착복구허가기간 연장 신청으로 도로굴착복구 노면표시 설치공사 제2차 작업기한을 아래와 같이 연기 시행코자(통보)합니다.

가. 건   명 : 도로굴착복구 노면표시설치공사 2차 작업기한 연기시행(통보)

나. 작업기한 시행 변경(제2차작업)

- 당초 : 2021. 7.23 ~ 8.31

- 변경 : 2021. 7.23 ~ 09.30

다. 작업수량 : ********************************

라. 귀책사유 : ******

마. 지연배상금 미부과(사유)

- **********************************************************************************  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	(주)트래픽스,태광개발
주무관	권은용		도로보수과장	08/25 윤옥광
협조자	주무관	이이용
시행	도로보수과-8031	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(5)