투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	설계변경 계약 의뢰(정산) - "여의2교 보수공사"

우리 사업소 2021년 예산사업으로 시행한『여의2교 보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종) 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 여의2교 보수공사

나. 공사개요 : 교면포장 42.7@, 표면보수 924.3㎡, 상판보수 77.4㎡

다. 공사기간 : 2021. 3. 30 ~ 2021. 9. 25

라. 계약금액 : 642,115,000원

마. 도 급 자 : 태화건설㈜ 대표  유순종

바. 공사비 변경 내역                                               (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공사비		746,207,700	775,170,000	증) 28,962,300
도급비	공급가액	583,740,909	612,070,000	증) 28,329,091
	부가가치세	58,374,091	61,207,000	증) 2,832,909
	계	642,115,000	673,277,000	증) 31,162,000
관 급 비		77,730,400	78,698,400	증) 968,000
이 전 비		26,362,300	23,194,600	감) 3,167,700

사. 설계변경사유 : 신규공종 및 물량 증·감에 따른 계약금액 변경

아. 예산과목 : 교량안전과, 일반교량관리, 여의2교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 서울시설공단 설계변경 관련 문서 일체 1부.

3. 제비율검증 및 산업안전관리비 정산검증 확인서 각 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 설계변경(정산) 검토보고서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	강연홍		시설보수과장	08/20 류태용
협조자
시행	시설보수과-2952	(		)	접수		(		)
우	07520		/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7971	/전송	2657-7970	/		/	부분공개(5)