문서번호	설비부-12029
결재일자	2021. 8. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
윤대영		장재순	08/23 김호성
협조

『도봉어르신문화센터 건립 기계설비공사』

관급자재(공기순환기) 계약취소 검토 보고

2021. 8.

도시기반시설본부

(설비부)

『도봉어르신문화센터 건립 기계설비공사』

관급자재(공기순환기) 계약취소 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『도봉어르신문화센터 건립 기계설비공사』에 소요되는 관급자재(공기순환기) 관련, 건설사업관리기술단으로부터 제출된 계약취소 및 재구매 요청 보고 건에 대하여 검토 결과를 보고 드림

Ⅰ		공사개요

○ ***************************

○ *******************

○ ******************************

○ ****************************

○ ********************************************

○ **************

○ *********************************

Ⅱ		관련근거

○ 관급자재(공기순환기) 계약취소 및 재구매 요청 (동부2감 제21-281호,'21.08.20.)

Ⅲ		검토내용

○ 계약현황

계약번호 (납품요구번호)	계약자	계약건명	납품기한	계약금액
***************** ******************	*****	******** ****	***********	***********

○ 계약취소 및 재구매사유

- 당초 계약은 공기순환기 제조업체와 조달청간 계약기간이 만료되어 납품기한이 2021.01.31.로 계약이 되었으며, 다수공급자계약은 납품기한  연장(2회)에 한하여 연기 하였으나, 준공예정일(2021.10.31.)까지는 조달계약법상 납품기한 변경이 불가하므로 현재 계약건에 대하여 취소 후 재구매

○ 건설사업관리기술인 검토의견

- 계약상대자가 제출한 도봉어르신문화센터 건립 기계공사  공기순환기(옵션) 구매계약 취소 및 재구매 요청사유를 검토한 결과 적합하다고 판단되며, 공사 공정 진행사항을 고려하여 공기순환기(옵션) 계약을 취소하고 재구매하는 것이 적정하다고 사료됨.

Ⅳ		보고자의견

○ 계약상대자가 요청한 계약취소 및 재구매 사항에 대하여 건설사업관리기술인의 검토의견이 적정하다고 판단되어 계약부서(총무부)에 계약취소후 재구매 의뢰하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.