투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(거점형 창의어린이놀이터 조성 기본 및 실시설계 용역)

1. 녹지관리과-6163(2021.8.23.)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행중인「거점형 창의어린이놀이터 조성 기본 및 실시설계 용역」과 관련하여 아래와 같이 준공 기한 연장 하고자 합니다.

가. 용역명: 거점형 창의어린이놀이터 조성 기본 및 실시설계용역

나. 용역내용 : 자연친화적 창의 모험 놀이공간 조성(6,000㎡)

다. 용역비 : 금84,000,000원

라. 계약업체 : **************

마. 준공기한연기

- 당초 : 2021. 6. 24. ~ 9. 6.

- 변경 : 2021. 6. 24. ~ 10.29.

바. 연기사유: 하천점용허가 및 주민의견수렴 등 절차 이행을 위한 시일 소요로 인해 준공기한 연기 불가피

사. 귀책소재: 한강사업본부(지체상금 미부과)

붙임 1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	공원부장
주무관	김재희		녹지관리과장	곽영만		공원부장	08/24 김상국
협조자	주무관	조승만		기획예산과장	안인숙		총무과장	정현석
시행	녹지관리과-6198	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02)2181-1156	/전송	02)2181-1169	/	jh116@seoul.go.kr	/	부분공개(5)