문서번호	토목부-16076
결재일자	2021. 8. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
윤효진		최진우	08/24 임춘근
협조

용역 설계변경(전체 4회, 1차 4회) 검토 보고

(세종대로 도로공간 재편사업 외 2개소 통합 감독권한대행 등 건설사업관리용역)

2021. 8.

도시기반시설본부

(토 목 부)

용역 설계변경(전체 4회, 1차 4회) 검토 보고

【세종대로 도로공간 재편사업 외 2개소 통합 감독권한대행 등 건설사업관리용역】

“한강대로 자전거전용도로 설치공사”공사가 타절되어 건설사업관리기술인 투입·철수 계획 조정 및 “을지로 도로공간 재편사업”착수 지연에 따라 용역을 중지코자 검토 보고드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 건설사업관리용역 변경계약(전체4회, 1차4회) 요청 [건설사업관리부-2021-03137(2021.8.20.)호]

Ⅱ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 세종대로 도로공간 재편사업 외 2개소 통합 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 규    모

- *************************************************************

- ****************************************

- ****************************************

○ 용역기간 : '20. 6. 22. ~ '22. 6. 30.(1차 : '20. 6. 22. ~ '21. 10. 5.)

○ 용 역 비 : 2,173,111천원(1차 : 1,709,333천원)

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링 외 1개사

Ⅲ		설계변경 내용

○ ******************************************************

○ ****************************************************************

○ **************************************************** 함.

○ 감리용역 변경 현황

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
전체 (4회)	용 역 비	*************	*************	*
	용역기간	*********************	*********************	*
1차 (4회)	용 역 비	*************	*************	************
	용역기간	*********************	*********************	*************

○ 투입기간 변경 내역

- 1차 4회

구분			건설사업관리기술인 투입기간												수량 (인·월)	증·감
등급	분야		2020년				2021년				2022년
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
**	** ****	**													*****	******
			*********				*******************
		**													*****
			*********				***************
**	** *****	**													*****	****
			******************				*********
		**													*****
			******************				****************
**	**	**													****	******
			*************				*****************
		**													****
			*************				**********
**	**	**													****	******
							*******************
		**													****
							***************
**	**	**													*****	******
			*************				*******************
		**													*****
			*************				***************
***** ********		**													*****	******
		**													*****
*******		**													*****	******
		**													*****
*****		**													******	******
		**													******

Ⅳ		조 치 의 견

○ 상기 보고 내용과 같이“세종대로 도로공간 재편사업 외 2개소 통합 감독권한대행 등 건설사업관리용역”전체 4회, 1차 4회 설계변경에 대해 검토한 결과 적정하므로 시행코자 하며, 을지로 도로공간 재편사업 시행 전까지 용역을 중지코자 합니다.

붙임 1. 설계변경 내역서(전체 4회, 1차 4회) 1부.

2. 감리단 검토의견서 1부.  끝.