문서번호	정수과-4034
결재일자	2021. 8. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		이해원	08/25 윤준성
협조

2021년 하반기 정수처리시설 청소용역 시행계획

2021. 8.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

2021년 하반기 정수처리시설 청소용역 시행계획

정수처리시설물의 퇴적물 등을 주기적으로 제거하고, 각종 설비의 점검 및 보수를 위해 “2021년 하반기 정수처리시설 청소용역”을 시행하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2021년 구의아리수정수센터 정수처리시설 청소용역

○ 대상시설 : 6개 공정, 70개지

※ 정수지 4지, 침전지 12지, 응집지 12지, 여과지 22지, 활탄지 16지,  농축조 4지

○ 용역기간 : 2021. 3. 2.~12. 31.

○ 계약금액 : 금113,930,130원

○ 용역업체 : ㈜티에이치서비스(대표자 : 황영숙, 소재지 : 서울시 중랑구)

○ 청소물량 : 148,750㎡(정수지 29,832㎡, 침전지 등 118,918㎡)

○ 주요내용 : 정수처리시설 주벽, 바닥, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

※ 응집지, 침전지 및 여과지 : 2회/년, 기타 시설물 : 1회/년

□ 추진경위

○ 2021.1. 4. : 사업계획 수립 및 계약심사 의뢰(상수도사업본부 안전총괄과)

○ 2021.1.26. : 계약의뢰(서울시 재무과)

○ 2021.2. 9. : 용역업체 계약 체결

○ 2021.3. 2. : 청소 관련 분야별 담당자 회의개최

(기계, 전기, 토목, 배출수, 수질, 공정 분야 담당자)

○ 2021.3.12.~4.21 : 상반기 정수처리시설 청소용역 시행

□ 상반기 추진결과 (세부추진내역 : 붙임 1)

○ 추진기간 : 2021. 3. 12. ~ 4. 21

○ 추진실적 : 연간계획 대비 45.6% 시행(실적 67,797㎡ / 계획 148,750㎡)

- 정수처리공정 물청소 : 63,156㎡

- 소형생물 서식환경 제거를 위해 청결구역 청소 추가 : 4,641㎡

[ ※ 2021년 상반기 정수처리시설 청소내역 : 세부추진내역 붙임1 ]

시설물명	시설수	연간 계획물량		상반기 청소실적 (㎡ )	공정율	비 고
		횟수	청소물량(㎡)
총 계	70지	1~2회	148,750	67,797	45.6%
정 수 지	12지	1회	29,832	0
응 집 지	12지	2회	26,117	13,059	50.0%
침 전 지	12지	2회	64,112	32,056	50.0%
여 과 지	22지	2회	14,404	7,202	50.0%
활성탄흡착지	16지	1회	7,392	7,392	100%
농 축 조	4지	1회	6,893	3,447	50%
청 결 구 역 (여과지, 활성탄흡착지 실내)	3개소	-	-	4,641		추가시행

[ ※ 2021년 상반기 정수처리시설 청소 사진 ]

< 침전지 바닥 청소 중 >	< 침전지 벽면 청소 중 >	< 침전지 청소 후 >

□ 하반기 추진계획

○ 추진기간 : 2021. 9. 2. ~ 10. 31

○ 청소물량 : 97,758㎡(세부추진계획 : 붙임 1)

- 연간 계획물량 : 85,594㎡

- 소형생물 대응 추가 물량 : 12,164㎡(착수정 1,890, 활탄지 10,274)

[ ※ 2021년 하반기 정수처리시설 청소물량 : 세부추진내역 붙임1 ]

시설물명	시설수	연간 계획물량		하반기 계획물량		비 고
		횟수	청소물량(㎡)	청소물량(㎡)	청소일
총 계	70지	1~2회	148,750	97,758
#1 착수정	2지	-	-	1,890	9월	1회추가
정 수 지	12지	1회	29,832	29,832	9월
응 집 지	12지	2회	26,117	13,058	9~10월
침 전 지	12지	2회	64,112	32,056	9~10월
여 과 지	22지	2회	14,404	7,202	9~10월
활성탄흡착지	16지	1회	7,392	7,392	9월	1회추가
농 축 조	4지	1회	6,893	3,446	10월
활탄지 실내	1개소	-	-	2,882	9월	2회추가

○ 청소방법(시설물 자체점검 및 보수공사 등 병행 실시)

- 정수지 : 주벽, 바닥, 정류공, 도류벽, 퇴수구 등 물청소

- 응집지 : 주벽, 바닥, 응집패들, 정류공 등 물청소 및 퇴적물 제거

- 침전지 : 주벽, 바닥, 트라프, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

- 여과지 : 주벽, 바닥, 트라프, 퇴수로 등 물청소

- 활성탄흡착지 : 주벽, 바닥, 트라프, 퇴수로 등 물청소

- 농축조 : 주벽, 바닥, 웨어, 수로, 슬러지수집기 등 물청소 및 퇴적물 제거

□ 행정사항

○ 용역업체 직원 대상 청렴, 안전교육 및 장내세균 검사 실시

○ 청소 전 동력기기 점검 및 전원공급 등 협조 : 정수시설과

○ 생산량 조절 및 수질관리 : 정수과(※ 정수지 통수 전 수질검사 : 수질연구실)

○ 청소 시 농축조 부하관리 및 방류수 수질관리 : 배출수처리 담당

붙임: 2021년 하반기 정수시설 청소 계획물량 및 추진일정 1부.  끝.