문서번호	시설보수과-6459
결재일자	2021. 8. 25.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일		김준섭	08/25 차창훈
협 조
	주무관			김영화
	주무관			이정호

준공기한 연기 검토 보고

(수출의다리고가 보수공사 실시설계용역)

2021.  8.

남부도로사업소

(시설보수과)

수출의다리고가 보수공사 실시설계용역

준공기한 연기 검토보고

『수출의다리고가 보수공사 실시설계용역』관련하여 준공기한 연기에 대한 검토 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 수출의다리고가 보수공사 실시설계용역

○ 용역기간 : 2021. 03. 02. ~ 8. 30.

○ 용역금액 : ***********

○ 도 급 자 : ************************

□ 보고내용

○ 승강기 설치관련 디자인 심의후 심의결과 반영에 따른 설계가 진행 되어야 하는 관계로 절대 공기 부족으로 준공기한 연기가 필요함.

- 디자인 심의 예정일 : 9. 9(목)

구 분	변 경 내 용		비 고
	당 초	변 경
용역기간	2021.03.02.~ 08.30.	2021.03.02.~ 10.15.
계약금액	***********	***********	변경 없음

□ 조치계획 및 행정사항

○ 상기 보고내용과 같이 준공기한을 연기하여 내실있는 용역업무 수행에 만전을 기하고자 함.

○ 준공기한 연기 의뢰 (관리단속과)

○ 연기에 따른 귀책 소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기 의뢰서 및 관련서류 각 1부.  끝.