“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약의뢰(2021년 은평구관내 상수도공사 건설폐기물처리용역)

1. 우리사업소에서 시행중인 「2021년 은평구관내 상수도공사 건설폐기물처리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)을 시행 후 계약의뢰 합니다.

가. 용 역 명 : 2021년 은평구관내 상수도공사 건설폐기물처리용역(장기계속단가계약)

나. 수 급 인 : **************

다. 계약기간 : 2021.04.05. ~ 2022.06.30

라. 설계변경 사유 : 시공 물량 증․감에 따른 처리물량 증감 및 폐기물처리비용 조기소진

1) 차수별 부기금액 변경내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비고(증․감)
용역비	******	***********	***********	*
	*********	**********	**********	*
	*********	***********	***********	*

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증․감		규격
폐기물 운반 (㎥)	**********	*********	*	**********	폐아스콘
	**********	**********	*	***********	폐콘크리트
	**********	**********	*	**********	폐토석
폐기물 처리 (ton)	*******	*	*	********	폐아스콘(절삭)
	**********	**********	*	***********	폐아스콘
	**********	**********	*	***********	콘크리트
	**********	**********	*	**********	폐토석
부가세 및 기타	**********	**********	*	***********
합 계	***********	***********		*

2) 차수별 부기금액 변경내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비고(증․감)
합 계		***********	***********	**
용역비	계	***********	***********	**
	공급가액	***********	***********	**
	부가세	**********	**********	**

마. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,(노후상수도관(배급수관)정비)

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,(노후밸브정비)

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,(상수도관 누수복구)

상수도사업비용,영업비용,급수공사,신설공사비,(급수공사 신설)

붙 임 : 1. 설계변경 개최결과보고서 1부.

2. 설계변경 요약서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 변경합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	강철운		시설안전팀장	권영안		시설관리과장	08/25 이준호
협조자
시행	시설관리과-14817	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3691	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(7)