문서번호	공원조성과-9564
결재일자	2021. 8. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주제공원팀장	공원조성과장
송창선		신현호	08/26 하재호
협조
	★주무관		강명환

「장기미집행 도시공원 보상사업」

SH공사 보상업무 위수탁비 집행방안 보고

2021. 8.

푸른도시국

(공원조성과)

「장기미집행 도시공원 보상사업」

SH공사 보상업무 위수탁비 집행방안 보고

‘장기미집행 도시공원 보상업무 위·수탁’ 관련 위탁수수료 지급 기준을 변경하여 집행률을 제고하고 보상업무를 원할히 추진하고자 함

□ 추진근거

○ 도시공원 보상업무 위수탁 관련 계약변경(안) 검토요청 [관악구 공원녹지과-10221호(2021.5.4.)]

□ 업무위수탁 계약현황

○ 사 업 명 : 장기미집행 도시공원 보상업무 위·수탁 사업

○ 위탁내용 : 토지·물건 및 권리 보상*****************************

○ 위수탁자 : 동작구·관악구·서초구(위탁자), 서울주택도시공사(수탁자)

○ 계약방법 : 동작구·관악구(용역계약), 서초구(위수탁계약)

○ 위탁기한 : 계약체결일(2019.9.)부터 본계약 위탁수수료 정산 완료시까지

○ 수 수 료 : ******************************

< 보상사업 추진현황(‘21.8.현재) >

*****************************************************************

**************************

******************************************

********************************************************************************************************************************

**********************

(단위: ㎡, 백만원, %)

**	***	****		****		*** *****
		*****	** *******	*****	****
**	******	********	*******	*******	*******	**
***	*******	*******	*******	******	******	**
***	************	********	*******	*******	******	**
***	***********************	*******	*******	*******	*******	**

*************************************************************************

□ 추진경위

○ ’19.07.09.  : ’19년 장기미집행 도시공원 보상사업 업무위탁(대행) 추진계획

○ ’19.07.10.  : 보상사업 업무위탁 추진계획 알림

○ ’19.09.04.  : 업무위탁(대행) 추진계획 검토보고

○ ’19.09.~10.: 자치구별 보상사업 업무위탁 계약서 체결

-*****************************************************

○ ’20.01.29.  : 도시공원 보상사업 위탁 변경계획 검토보고

-****************************************************

○ ’21.05.04.  : 도시공원 보상업무 위수탁 관련 계약변경(안) 검토요청(관악구)

○ ’21.08.25.  : 사전컨설팅 의뢰 건 회신(감사담당관)

□ 위탁수수료 집행현황

○ ‘장기미집행 도시공원 보상업무 위․수탁계약서’ 지급기준에 따라 집행실적 없음

- ‘위탁수수료의 60%는 모든 보상사업에 대한 수용재결 보상금 집행 완료시, 40%는 모든 보상사업에 대하여 본 계약에 따른 정산보고서 제출시 지급’(위수탁계약서 제7조)

○ **********************************************************************************

□ 집행방안

○ 위수탁계약서 수수료 지급 기준을 보상이 완료된 토지는 수수료를 지급할 수 있도록 변경하여 예산 불용 최소화, 수탁기관 업무효율 제고

- 사전컨설팅 결과 ‘계약조항 변경 가능’ [감사담당관-14194호(2021.8.25.)]

○ 위수탁계약서 변경내용

- 지방계약법 제67조를 준용하여 기성 대가 지급조항 추가

제7조(위수탁수수료의 산정 및 지급기준) ①∼④항 동일

<신 설>

⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 “수탁기관”은 계약업무의 원활한 수행을 위하여 일부 보상사업을 완료하였을 때에도 위탁수수료의 기성대가 지급을 요청할 수 있다.

⑥ 제5항에 따라 위탁수수료의 기성대가 지급 청구가 있을 때에는 “위탁기관”은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제67조를 준용하여 기성 부분에 대한 대가를 지급할 수 있다.

○ 기성금 지급후 위탁수수료 불용액 발생시에는 장기미집행 도시공원 보상사업 완료(정산)시점에 예산확보(본예산 또는 추경)하여 지급

□ 향후계획

○ 자치구(동작·관악·서초)로 위수탁계약서(변경) 사항을 통보하고, 자치구와 SH공사 간 계약변경 체결하여 수수료 집행

붙임  1. 도시공원 보상업무 위수탁 관련 계약변경(안) 검토요청 1부

2. 사전컨설팅 의뢰건 회신문 1부

3. 장기미집행 도시공원 보상업무 위·수탁계약서(변경) 1부.  끝.